투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(2018이촌롤러경기장 개보수공사 실시설계용역)

우리과에서 발주하여 시행중인 「2018이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계 용역」 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 2018이촌한강공원 롤러경기장 개보수공사 실시설계용역

2. 용역기간 : 2018.10.29. ~ 2018.11.27.

3. 용역금액 : 금15,700,000원

4. 용역업체 : ㈜스포츠그룹지인 대표 정구석

5. 준공기한 변경내용

당 초	변 경	비 고
2018.10.29.~11.27.	2018.10.29.~12.7.	10일간 공기연장

6. 연기 귀책소재 : 한강사업본부

7. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 1. 용역기간 변경계획 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝 끝.

	공원부장
주무관	박종민		공원사업과장	송경수		공원부장	11/23 김인숙
협조자
시행	공원사업과-2291	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	(02)3780-0873	/전송	(02)3780-0745	/	baram029@seoul.go.kr	/	대시민공개