문서번호	건축부-16804
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	복지시설과장	건축부장
김동범	조영수	11/23 임인구
협 조
	장비회계팀장		원용기

금천소방서 건립공사 설계용역 계약변경(기간연장) 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

건 축 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

금천소방서 건립공사 설계용역

계약변경(기간연장) 검토보고

「금천소방서 건립공사 설계용역」과 관련하여 설계자로부터 용역기간 연장 요청이 있어 검토 보고 드림

1		용역현황

□ 설계용역 개요

○ 계 약 명 : 금천소방서 건립공사 설계용역

○ 위    치 : 서울특별시 금천구 독산동 1054-8 외 15 (시흥대로 344)

○ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,249.56㎡

○ 용    도 : 공공업무시설(소방서)

○ 설 계 자 : UIA건축사사무소(주) 위진복

○ 계약금액 : 557,000천원

○ 용역기간 : `17. 6. 21. ~ `18. 11. 30.

□ 추진경위

○ `17. 06. 21. : 설계용역 착수

○ `17. 09. 05. : 계획설계 확정 통보(구로소방서 → 건축부)

○ `17. 10. 12. : 기본설계 자문회의

○ `18. 04. 16. : 설계용역 기간연장(`18.4.16. → `18.11.30.)

○ `18. 06. 02. : 경관심의

○ `18. 08. 09. : 기본설계 VE 심사결과 통보

○ `18. 10. 25. : 건설기술심의 심의결과 통보(재심의)

○ `18. 11. 13. : 설계용역 기간 연장 요청(UIA건축사사무소 → 건축부)

2		용역기간 연장 검토

□ 관련근거

○ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제14장 용역계약 일반조건, 제7절 2. 계약기간의 연장

○ 설계기간 연장 요청 건(UIA-18-004, `18.11.13.)

□ 조정사유

○ 기본설계 후 제출된 공사내역서 상 공사비가 추정공사비(예산)보다 대폭 증액되어 재검토(설계VE) 실시 및 조정기간 추가 소요

○ 금천구의 굴토심의 및 구조심의(추가) 협의기간 소요, 설계도서 작성 및 반영

□ 조정내용

구 분	변경전	변경후	비 고
용역기간	`*********************	`********************	****
용역비	**********	**********	****

□ 연기 귀책소재 : 서울특별시

□ 지체상금 : 미부과

□ 처리의견

○ 상기와 같이 용역기간을 연장함이 타당하므로 변경계약하여 동 설계용역을 원만히 수행토록 조치하고자 함.

3		향후추진계획

○ `18. 11. : 설계용역 계약변경

붙임  설계용역 납품일정 변경 요청 1부.  끝.