문서번호	도로관리과-17369
결재일자	2018.11.23.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		도로굴착관리팀장	도로관리과장
정호운		김근용	11/23 박문희
협조

2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계)

기성검사 결과보고

2018.  11.

안전총괄본부

(도로관리과)

2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계)

기성검사 결과보고

2018년도 노면하부 공동탐사용역(1단계)에 대한 3회 기성검사를 시행하고 결과를 보고드림.

※ SP-18-125호(2018.11.21.) : 2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계) 기성부분준공(3회) 신청

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2018년 노면하부 공동탐사용역(1단계)

○ 계약기간 : 2018. 6. 5. ~ 2018. 12. 15.

○ 계약금액 : 금1,244,998,000원

○ 계 약 자 : 셀파이엔씨(주)외 1개사

○ 계약내용

- 공동탐사 950㎞, 목표 공동 342개소

- 보도구간 GPR탐사 방안연구, GPR단면에 의한 공동규모 정량적 분석 연구

□ 기성(3회) 검토내용

○ 기성기간 : 2018. 10. 24. ~ 11.21.(공정률 : 100%)

○ 기성신청 금액

(단위 : 천원)

계약금액 (A)	전회기성 (D)	금회기성(2회) (E)	누계금액 (B=D+E)	잔여금액 (C=A-B)
1,244,998	902,000	188,000	1,090,000	154,998

○ 기성신청 내역

구 분	계약수량	금회기성수량	누계기성수량	금회기성률
1차탐사	950㎞	146㎞	888㎞	15.3%
1차탐사 GPR자료분석	950㎞	146㎞	888㎞	15.3%
2차조사(천공)	342개소	105개소	297개소	30.7%

○ 검토내용

- 상기와 같이 기성신청(3회) 건에 대하여 승인 처리후 계약담당부서에 기성부분 준공검사를 통보하고자 함

□ 향후계획

○ ’18. 11. : 기성검사조서 결과 통보(재무과)

○ ’18. 12. 15. : 용역 준공

붙 임 : 1. 기성부분준공(3회) 신청서 1부.

2. 일일 작업일보(11.21) 1부.  끝.