문서번호	동물복지2과-4492
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	동물복지2과장	동물원장	서울대공원장
김미란	송부용	어경연	11/26 송천헌
협 조
	전략기획실장		유연호
	동물기획과장		김보숙
	시설과장		오임석
	동물복지1과장		김영섭

기번아일랜드 조성 공사 완료 보고

2018. 11.

서울대공원

(동물복지2과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

기번아일랜드 조성 공사 완료 보고

기번의 고유 행동 재현과 관람 효과 증진을 위한 기번아일랜드 조성 공사완료에 대한 관련 부서와의 합동점검 실시 후 보완 사항을 조치완료함에 따라 기번아일랜드 조성 공사 최종 완료를 보고함

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 기번아일랜드 조성 공사

□ 위    치 : 과천저수지 내 테마가든 부근 섬

□ 과업내용 : 기번아일랜드 조성, 쉘터 설치 등

□ 용역기간 : 2018. 9. 18. ~ 11. 20.

□ 소요예산 : *********

- 동행기금: ********

- 전기공사: ********

□ 시공업체

- 동행기금: ****

- 전기공사: 시설과

Ⅱ		공사진행 경과

□ 샤망아일랜드 조성 및 행동강화 전시계획 수립: 2018.8.14.(동물기획과)

□ 샤망아일랜드 조성을 위한 관계관 회의 개최 – 동물복지2과 주관

: 1차(‘18.8.30.),  2차(‘18.9.3.),  3차(‘18.9.7.)

※ 샤망아일랜드 조성을 위한 회의개최 결과 통보(부서별 추진) - 동물복지2과

□ 일시 : 2018.9.11.(화)

□ 내용 · 전략기획실 : 동행기금 집행

· 시설과 : 분야별(수도, 전기 등) 업무 추진

· 조경과 : 수목 제거

· 동물기획과 : 샤망아일랜드 명칭 및 입간판, 설명판 설치

· 동물복지2과 : 전시사육에 따른 사육시설 설치 감독

□ 기번아일랜드 조성 시설공사

- 내    용: 쉘터, 전기철책문, 교량 출입문, 관람장 외부 난간, 대나무 놀이시설(기번타워 및 로프) 설치 및 출입 교량 보수

- ***************

- 예산과목: 동행기금

□ 샤망아일랜드 조성 전기공사 : 2018.9.27.(시설과)

- 내    용 : 전력간선케이블(배관 약 300m)포설 및 분전반 설치

- ****************

- 예산과목 : 동물관리및프로그램 운영, 시설비(동물복지1과 예산)

□ 수도관 작업 완료 : 2018.9.20.(기계보수반 자체 설치)엑셀관 40m 매설

□ 관련 부서 합동 점검 : 2018.11.13.

□ 최종 공사 완료일 : 2018. 11. 20.(화)

Ⅲ		공사완료에 따른 점검 및 조치 결과

□ 점검일시 : 2018. 11. 13.(화) 15:00~16:00

□ 주   관  : 동물복지2과

□ 참 석 자 : 총 13명

- 전략기획실 : *************

- 시  설  과 : ****************

- 동물기획과 : *****

- 동물복지1과 : ********************

- 동물복지2과 : **************************

- 아일랜드 조성공사 용역업체 : ********

□ 점검 및 조치 결과

연번	점검시 보완 요구사항 내역	조치 결과
1	동물탈출에 대한 안전성 동물이 다리통로의 진입을 막을 수 있는 방안 마련 필요	내년 3월까지 방안 마련 예정
2	로프에 대한 안전성과 내구성 테이프 제거 후 철링 마감 예정	제거 가능한 테이프는 제거하고, 철링 마감시 철링 빠짐현상 발생으로 인해 로프 끝 콘베이어벨트 접착용 고무본드 처리로 매듭 풀림 방지 완료함
3	열등 사용에 따른 화재 발생 가능성 - 덮개 측면으로 열 방출이 가능하도록 덮개 보완	덮개 측면 열 방출 가능하도록 보완 완료함
4	사육사 통행시 시설물 안전성 및 편의성 - 전기책문 손잡이 날카로운 면 보완 창고문 손잡이, 안쪽 빗장 설치 예정	전기책문 보완완료 손잡이, 빗장 설치 완료
5	대나무 시설물의 적정성	사육개체 입사 후 검토예정
6	마무리 공사완료 후 주변 정리정돈 요청	주변 정리정돈 완료

Ⅳ		향후 계획

□ 사육개체 다리통로의 진입 차단 방안 이외의 보완사항이 완료 확인

되어 전략기획실에 기번아일랜드 공사 완료 통보 예정

□ 입간판 및 설명판 : 12월 중순경 설치 예정(동물기획과)

□ 2019년 3월경 기번류 동물 선정 후 전시 관람 예정

붙임. 기번아일랜드 조성 준공 사진 1부.  끝.