문서번호	도로보수과-10868
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	11/26 이학구
협 조
	주무관			代임동운

『초기대응능력 향상을 위한』

자동염수살포장치 설치 및 수리계획

2018. 11.

『초기대응능력 향상을 위한』

자동염수살포장치 설치 및 수리계획

『서울型 중･단기 제설 개선대책』일환으로 우리사업소 관내 제설 취약 구간인 성산고가차도 분기도로(양방향)에 자동염수살포장치 설치 및 현저고가 하부 수리를 통해 강설초기 도로결빙을 방지하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 도로보수과-9616(‘18.10.18.)호

○ 자동염수살포장치 설치 관련 검토 의뢰

□ 시설보수과-8624(‘18.10.29.)호

○ 성산고가차도 하부 환경개선공사 주민 설명회 결과보고

□ 도로관리과-10604(‘18.11.16.)호

○ 자동염수살포장치 설치 및 정비 예산 재배정

Ⅱ		자동염수 살포장치 현황

□ 자동염수 살포장치 현황 : 5대

설치위치	규격	설치일시	비고
현저고가 하부 (성산로)	․ 배관길이 : 400m ․ CCTV : 2대 ․ 탱크용량 : 10톤	2012.11	수리 예정
금화터널~봉원고가 (성산로)	․ 배관길이 : 400m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 10톤	2015.11
금화터널~현저고가 (성산로)	․ 배관길이 : 200m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 10톤	2016.08
구파발역입구~박석고개 (통일로)	배관길이 : 600m ․ CCTV : 1대 ․ 탱크용량 : 10톤	2017.12
퇴계로 지하차도 주변 (소파로, 삼일대로)	․ 배관길이 : 250m ․ CCTV : 3대 ․ 탱크용량 : 5톤	2011.11	재설치 예정 (‘18년 상반기 도기본)

Ⅲ		설치개요

□ 자동염수 살포장치 구매

○ 대 상 지 : 성산고가차도 분기도로(양방향)

○ 설치규모 : 자동제설장치 5,000L 1대 / 살수기PE 100m / 펌프 20L/min / 기초 콘크리트 공사/전기, 통신 등 인입

○ 위치도 및 현장사진

위 치 도	현장사진(분기도로 우측)
현장사진(분기도로 좌측)	현장사진(펌프하우스 설치대상지)

○ 선정사유 : 해당구간은 경사구배가 높아, 강설시 사고위험이 높고 결빙의 우려가 많은 제설 취약 구간

○ 현황조사 및 검토의견

- 설치구간(약 100m)이 길지 않아 자동제설장치 5,000L 설치

- 자동제설장치 및 약품탱크 보관 장소 설치를 위한 거주차우선주차구역 3곳(15-34-26 외 2곳) 이설 필요(마포구 교통지도과 협의 완료)

- 양측은 보도구간으로 염수 살포시 각도 및 수압 조절 필요

- 펌프하우스 설치대상지는 경사가 있어 평탄성 확보를 위해 기초 콘크리트 공사 필요

○ 자동염수 살포장치 조달청 단가

품명	규격	단가(천원)	제조업체	인도조건	비고
**** **** ***********	******************** ******************	********	********	*****	****** *********

○ 제품 선정 사유

- 조달청 우수제품으로 등록되어 있고 유지관리 등을 고려하여 ***********으로 선정

○ 구매방법 : 조달구매(제3자 단가계약)

□ 자동염수 살포장치 전기시설(인입선) 설치 및 기초콘크리트 공사

○ 설치대상 : 자동염수 살포장치[성산고가차도 분기도로(양방향)]

○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호(공사금액 2,000만원 이하)

Ⅳ		수리개요

□ 자동염수살포장치 수리

○ 대    상 : 현저고가 하부 자동염수살포장치

○ 파손사유 : 기기 노후화(2012년 11월 설치)

○ 파손규모 : 밸브 15EA 및 부속품, CCTV 1대 및 부속품 등

밸브 및 케이블 파손	배관 파손	공유기 고장

○ 수리업체 : ******

- 사유 : 자동염수살포장치(현저고가하부)를 설치한 업체로 해당 기기에 관해 가장 잘 알고 있으며, 3개 업체의 견적 검토 후 타사보다 저렴한 가격의 업체로 수의계약 체결

○ 계약방법 : 1인 견적 수의계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호(수리금액 1,500만원 이하)

Ⅴ		소요예산(안)

□ 총 소요예산 : 금105,000천원

○ 자동염수 살포장치 구매 : 금75,000천원

○ 전기시설(인입선) 설치 및 기초콘크리트 공사 : 금20,000천원

○ 자동염수살포장치 수리 : 금10,000천원

□ 예산과목

○ 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리, 제설대책추진, 시설비및부대비, 시설비

(₩109,426천원)

Ⅵ		향후계획

□ ‘18.11월 말 : 조달구매 의뢰(조달청)

□ ‘18.12월 초 : 기초콘크리트 공사 및 자동염수살포장치 설치

□ ‘18.12월 중 : 전기시설(인입선) 설치 공사

붙임 1. 성산고가차도 하부 환경개선공사 주민 설명회 결과보고 1부

2. 거주자우선주차구역 이설 및 영구삭선 협조 요청 1부

3. 예산 재배정 알림 1부.  끝.