투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청(중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사)

1. 토목부-12462호(2018.07.18.)와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』에 소요되는 관급자재 납품기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 납품기한 연기 내역

품명	식별번호	규격	단위	수량	납품요구번호
시멘트	21639846	포틀랜드시멘트(1종) 40kg	포	690	12-18-1-58409-00

1) 납품기한: (당초) 2018.08.30. → (변경) 2018.12.20.

2) 변경사유: 시설공사 준공기한 연기에 따른 관급자재 납품 연기

끝.

	토목부장
주무관	권해엽		교량건설과장	장종환		토목부장	11/26 김영수
협조자	주무관	김동현
시행	토목부-19915	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개