문서번호	토목부-19921
결재일자	2018.11.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	11/26 김영수
협조
	주무관		남덕희

교통운영 구간 제설대책(2018년) 검토보고

- 강남순환도시고속도로(4공구) -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11

도시기반시설본부
(토 목 부)

-강남순환도시고속도로(4공구)-

교통운영 구간 제설대책(2018년) 검토보고

강남순환도시고속도로 4공구 공용중 도로구간(호암대교 및 소하JCT 시설물)에 대하여 제설대책을 수립하고 검토보고 드림

공사개요

❍  위    치 : 금천구 독산동～ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

❍  규    모 : 폭 4~8차로, 연장 2.48km

❍  총사업비 : 3,580억원(도급비 1,984억원)

❍  공사기간 : □01. 12. 29. ～□19. 11.30.(민자구간 개통 □16. 7.3.)

❍ 시공사/건설사업관리단 : 롯데건설㈜/㈜서영엔지니어링

관련 추진경위

❍ 2016.  7. 3. : 강남순환로(4공구) 부분개통

- 호암대교, 소하JCT 및 광명시구간 도시계획도로

❍ 2017. 11. 3. : 강남순환로 재정사업구간 시설물 인계인수 검토보고

- 개통한 시설물의 체계적 유지관리를 위해 주관부서에 이관 조치 요청

❍ 2017. 11. 6. : 강남순환로 재정구간 공용중 시설물 이관 요청(토목부→도로계획과)

❍ 2018.  1. 11. : 시설물 관리방안 검토의견(도로계획과→토목부)

- 유지관리부서(도로시설과)에서 전체공사 준공후 일괄 인수하겠다는 입장으로

단기적으로 공사비로 시설물 유지관리 조치

❍ 2018. 11.21. : 개통구간 제설대책 실정보고(건설사업관리단)

건설사업관리단 검토의견

❍ 당 현장 부분개통 구간(호암대교, 소하JCT램프, 광명시 도시계획도로) 동절기 제설대책을 수립하여 강설시 교통사고 예방 조치가 필요함.

❍ 제설구간 위치도

※ 제설차 이동 경로

① 금천영업소 → 소하JCT DOWN RAMP-A → 서해안 고속도로 접속부 → 광명IC 회차

→ 소하JCT UP RAMP → 금천 영업소(회차)

② 호암대교 → 호암대교(수원) → 남광명IC(회차) → 호암대교(수서) → 금천영업소

③ 호암대교 → 소하JCT DOWN RAMP-B → 도시계획도로(성산) →금하교차로(회차)

④ 도시계획도로(일직) → 기아대교 교차로(회차) → 도시계획도로(성산) →

도시계획도로(성산방향) → 금하교차로(회차)

⑤ 도시계획도로(일직) → 수원-광명 UP RAMP → 금천 영업소

❍ 제설대책 현황

구 분	장비 및 자재	규 격	수 량
제설장비 임대 운영	제설삽날+살수 차량	15ton	- 1대 - 4개월 운영 (2018.11.15.～ 2019.3.15.)
2. 액상 제설재	친환경 염수(4개월분)	액상	60ton
3. 자동염수살포 장치	펌프,콘트롤,밸브,분사장치,하우스 등	3~20ℓ/min	- 3기 - 4개월운영
4. CCTV 운영	실시간 강설, 살포장치 가동, 제설작업, 교통흐름 파악용	450만화소	3대

❍ 수량 증·감 현황

공 종	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비고
제설삽날+살수 차량 운영	대	-	1	1
액상 제설재	ton	-	60	60
자동염수살포 장치 운영	기	-	3	3
CCTV 운영	기	-	3	3
상황대기 및 제설관리 (보통인부)	월	-	4	4

❍ 공사비 증․감 현황

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
직 공 비	-	57,016	57,016
제 잡 비	-	15,784	15,784
총공사비	-	72,800	72,800

검토의견

❍ 강남순환도로 4공구 공용중 구간에 대한 2018년 제설대책 시행 계획으로서, 건설사업관리단의 실정보고는 적정하므로 승인하고 추후 설계변경시 반영하고 제설대책 완료 후 실투입량으로 정산처리코자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부. 끝.