＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신	수도자재관리센터소장
(경유)
제목	관급자재(폴리에틸렌 피복 강이형관) 납품기한 연기 요청

1. 수도자재관리센터-11488(2018. 7. 2.),15452(2018. 8.21.)호, 시설과-7107

(2018. 7.31.), 8552(2018. 9.10.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 시행중인『국사봉배수지 건설공사』에 소요되는 관급자재 중 아래 건에 대한 납품기한 연기를 요청합니다.

가. 변경내용

건 명	계약번호	계약금액(원)	납품기한
			당초	변경
수도용 폴리에틸렌 피복 강이형관 제작구매 (대형75번)	2018060BBFC00	102,111,000	2018. 11. 30.	2018. 12. 30.

나. 변경사유 : 송배수관 부설 일정 변경에 따른 관급자재 사용계획 변경.

붙임 : 물품계약서 사본 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	차승현		시설과장	11/26 송병욱
협조자
시행	시설과-11057	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)서울시 상수도사업본부	/
전화	02-3146-1496	/전송	02-3146-1529	/	201107260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)