과 장		11/26 유태용	심사자	김동민		설계자	정회곤		설 계	심 사		결 재
									2018년 11월 일	2018년 11월 일
설 계 변 경 서(정산)
	용역명 : 2018년 노후포장도로 노면표시(강서1구역)설계 및 감리용역(정산)
	구 분				금 액						비 고
					당 초			변 경			증.감
	총 공 사 비				금 7,796,000원			금 13,004,000원			증 5,208,000원
	도급비	공 급 가 액			금 7,044,000원			금 11,750,909원			증 4,706,909원
		부 가 가 치 세			금 704,000원			금 1,175,091원			증 471,091원
		손해배상공제료			금 48,000원			금 78,000원			증 30,000원
		계			금 7,796,000원			금 13,004,000원			증 5,208,000원
공사개요 - 당 초 : 상세도 작성 30매 - 변 경 : 상세도 작성 67매