투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 월계역사 연장 공사 관련 협조 요청

1. 토목부-1770호(2018.01.30.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사』와 관련하여 유관기관 협의 결과 등으로 공사가 연장되어 월계역 주차장 부지에 대한 일시 점용기간 연장을 요청하오니 귀 구 주민들을 위한 사업임을 감안하여 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

주차장 부지 임시사용 연장 요청 -

○ 사용기간 : (당초)‘18.03.01. ~  11.30 → (변경)‘18.03.01. ~ ‘19.04.30.

○ 사용목적 : 하부구조물(교각) 및 보량교량 거치 등 공사 시공

○ 공사일정

-‘18.11. ~‘18.12. : 상부슬래브 콘크리트 타설, 부대시설물 설치

-‘19.01. ~‘19.02. : 상부 데크 설치, 전기공사, 지하차도 옹벽 철거 및 터파기

-‘19.02. ~‘19.04. : 가각 정리, 옹벽 시공, 주차장 부지 정리 등

※ 가각 정리는 노원구 숙원사업으로 현재 서울시 주차계획과와 노원구(토목과)간 협의 중에 있으며, 협의 결과에 따라 진행 여부 결정

-‘19.05.01. : 중랑천 초안산 앞 보행교량 전구간 개통 예정

붙임  월계역 공영주차장 주차면 철거 관련 자료 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	노원구청장(교통지도과장),노원구서비스공단이사장
주무관	권해엽		교량건설과장	代김동현		토목부장	11/27 김영수
협조자	주무관	김동현
시행	토목부-19994	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2578	/전송	02-3708-2599	/		/	대시민공개