문서번호	시설과-3019
결재일자	2018.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
이재홍	김영균	11/27 진병규
협 조

공사실정보고

≪2018 지방폐교활용 가족자연체험시설 전기공사≫

2018. 11.

동부공원녹지사업소 시설과

공사실정보고

≪2018 지방폐교활용 가족자연체험시설 전기공사≫

2018 지방폐교활용 가족자연체험시설 전기공사와 관련 현장여건에 따른 공종 변경사항이 있어 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공사명: 2018 지방폐교활용 가족자연체험시설 전기공사

❍ 위  치: 상주시 용포분교(경북 상주시 낙동면 선상서로 1587)

❍ 기  간: 2018. 11. 9. ~ 2019. 1. 7.

❍ 규  모: 조명, 전열, 배선 등 전기시설 정비

❍ 도급비: 61,564,720원

❍ 도급자: 스페이스파워(주) 대표 김병철

Ⅱ		보 고 사 항

공종 변경사항	검토 의견	증감액
벽부등 2등 ⇒ 천정 조명등 2등 (화장실 세면대 앞)	물 사용장소의 전기안전 및 미관을 고려하여 노출배관 벽부등을 매입배관 천정 조명등으로 변경.	증10천원

※ 상기 공종변경에 따른 관급자재 수량 변경 필요.(감38천원)

Ⅲ		보 고 의 견

❍ 상기 공종변경 사항에 대하여 시공하고 추후 설계변경 시 반영.

❍ 상기 공종변경에 따른 관급자재 수량 변경 계약 의뢰.  끝.