문서번호	공원기획과-3618
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공원기획과장	공원부장
곽영만		김호규	11/27 김인숙
협조
	주무관		임이환

『한강공원 난지캠핑장 보수정비공사』

공사감독 보고

공 원 부

(공원기획과)

『한강공원 난지캠핑장 보수정비공사』

공사감독 보고

『한강공원 난지캠핑장 보수정비공사』추진과 관련하여 설계변경 사유가 발생하여 다음과 같이 보고드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 난지캠핑장 보수정비공사

○ 위    치 : 서울시 마포구 한강난지로 28(난지캠핑장)

○ 공사기간 : 2018. 10. 4. ~ 12. 2.

○ 공사내용 : 철거공사 등 6 개 공종

- 철거공사 : 장애인 샤워실 등 5 종 철거

- 포장공사 : 잔디보호매트 등 3 종 포설

- 시설물공사 : 샤워실 등 10 종 설치 및 정비

- 식재공사 : 미루나무 등 5 종 식재

- 상수인입공사 : 분기관 등 7 종 설치

- 오수처리공사 : 오수관 등 3 종 설치

○ 공 사 비 : 금 689,960천원(도급비 245,343천원, 관급자재비 444,617천원)

○ 도급회사 : ㈜수프로(대표 채일)

- 하도급 계약

하도급 공종	도 급 액(원)	하도급 계약 현황				비고
		회사명	전문건설업종명	계약일	하도급액(원)
******	**********	****	*******	**********	**********	******

○ 현 공정 : 75% 추진

□ 설계변경 검토회의

○ 일    시 : 2018.11. 9.(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 난지캠핑장 공사 현장

○ 회의내용 : 공사의 설계변경에 따른 공종 및 수량 등 검토

○ 참 석 자 : 공원부장 외 4명

- 한강사업본부 : 녹지 6 급 곽영만, 전기 6 급 임이환

- 설 계 사 : 조경설계 솔빛(박용태 부장)

- 현장감독 : ㈜수프로(이병엽실장)

○ 주요변경 세부내용

- 철거공사

· 흙콘크리트, 투수블럭(음수대 철거, 샤워실 신설) 등 철거 물량 변경

- 포장공사

· 철거공사 변경 부분 원상복구에 따른 물량 변경

- 시설물공사

· 관정개발 및 소화전 설치 사업대상에서 제외 향후 재검토

· 음수대 및 세족장을 일체형 시설물로 변경

· 식기세척장 1개소 위치 변경

· 화징실 및 샤워실 캐노피 신설 및 진입램프 규모 축소

- 수목 식재 및 이식공사

· 미루나무 식재 및 시설물 설치에 따른 이식 수목 물량 변경

· 미관을 저해하는 주차장 녹지 및 캠핑장 생울타리 정비

- 상수인입 및 오수처리공사

· 식기세척장 위치 변경 및 하수관로 관경 확대 등 현실에 맞는 시공

- 세부변경 내용

공 종	설계변경 내용	변경 물량			비고 (도면번호
		당 초	변 경	증 · 감
총 계		6개 분야 공사
철거공사	소 계	2개 공종 물량 변경
	○ 흙콘크리트포장 철거 물량 증가 - 상하수도 매설에 따른 보도 굴착 구간 설계 미반영	98㎡	약 230㎡	132㎡	L-201
	○ 투수블럭 철거 물량 증가(신규) - 주차장 부분 샤워실의 기초 부분 및 기존 음수대 바닥 투수블럭 철거 설계 미반영	0㎡	약 490㎡	490㎡	L-201
포장공사	소 계	2개 공종 물량 변경
	○ 잔디보호매트 물량 증가 - 식기세척장 주변 물량 추가	680㎡	약 700㎡	20㎡	L-202
	○ 마사토 포장 물량 증가 - 기존 음수대 및 화장실 철거 부분 원상복구에 따른 물량 증가	0㎡	약 270㎡	270㎡	L-202
시설물 공사	소 계	5개 공종 물량 변경
	○ 지상식 소화전 사업대상 제외 - 설계변경 사유 별도 보고	2개소	0개소	⊿ 2개소	L-203
	○ 화장실 및 샤워실 진입램프 규모 축소 - 진입램프를 현장여건에 맞게 규모를 축소하여 설치	12㎡	4㎡	⊿8㎡	L-317
	○ 관정개발 사업대상 제외 - 설계변경 사유 별도 보고	1식	0식	⊿ 1식	L-203
	○ 화장실 및 샤워실 캐노피(신설) - 화장실 및 샤워실에 캐노피 추가 설치	0개소	6개소	6개소
	○ 음수대 및 세족장 변경 - 음수대 및 세족장을 일체형 시설물로 변경하여 세척장 내에 설치하여 이용 및 토지 활용도를 높이고자 함.	4개소	2개소	⊿2개소	L-203
상수인입 및 오수처리공사	소 계	1개 공종 물량 변경
	○ 하수관로 관경 확대 및 시설물 위치 변동으로 물량 변경	0식	1식	1식	L-205 L-206

공 종	설계변경 내용	변경 물량			비고 (도면번호
		당 초	변 경	증 · 감
수목식재 및 이식공사	소 계	5개 공종 물량 변경
	○ 눈주목 식재 물량 증가 - 샤워실 주변 식재 물량을 추가하여 몰카 등 성범죄 예방	900주	약 1,200주	300주	L-204
	○ 주차장 녹지공간 정비 - 미관이 저해되는 화살나무를 모아심기 등 정비하여 미관 향상	신식 0주	약 1,500주	1,500주	-
		이식 0주	약 170주	170주
	○ 잔디 물량 증가 - 잔디보호매트 및 샤워실 주변 정비	680㎡	약 910㎡	230㎡	-
	○ 주차장 주변 생울타리 정비 - 측백나무 이식 - 해당화 식재	0주 0주	약 200주 약 750주	200주 750주	-
	○ 미루나무 식재 및 샤워실 등 시설물 설치에 따른 수목 이식 - 느릅나무 이식 - 느티나무 이식	0주 1주	9주 34주	9주 33주	L-201
전기공사 관로매설	○ 전기인입 관로 매설 추가 - 사업대상지내 상하수도와 연계한 굴착공사 일원화	0M	700M	700M	-
관급자재	소 계	-
	○ 투수블럭 물량 감소 - 음수대 및 세족장 위치 변경	65㎡	54.55㎡	⊿ 10.45㎡	L-203
	○ 잔디보호매트 물량 증가 - 식기세척장 주변 신설	680㎡	700㎡	20㎡	-

○ 관정개발

- 난지캠핑장 인근 설치된 소화전은 4개소(캠핑장내 1, 외곽 3)로 정상 작동 중임.

- 한강구역내 지하수 개발은 “충주댐관리소”와의 ‘댐용수공급계약’을 체결하고

- ‘댐용수 사용승락서’와  ‘하천수개발계획서’를 첨부하여 “한강홍수통제소”로부터하천수 사용허가를 득하여야 하며, 이에 따른 소요기간은 6개월 이상이며, 승인 후 5년 주기로 ‘허가연장을 위한 영향조사’를 받아야 하며 이에 따른 수수료는 10,000천원임

- 관정개발은 장기간 소요되어 사업대상에서 제외하고 2019년 계획 중인 ‘난지캠핑장 리모델링사업 기본계획’에 반영 장기계획으로 검토하고자 함.

□ 사업금액 변경

- 예상 변경 금액

구 분	당 초	변 경	증·감내용
총 액	689,960,500원	730,000,000원	40,039,500원
도 급 액	245,343,500원	285,020,000원	39,676,500원
관급자재비	444,617,000원	444,980,000원	363,000원

□ 보고자 의견

○ 사업계획 변경으로 사업금액이 증가할 것으로 예상되며, 향후 설계 도서를 작성, 변경금액을 확정하여 서울특별시 한강사업본부 설계변경 자문위원회 운영기준 제8조(설계변경자문 대상)에 의거 자문을 거쳐 설계변경을 시행하고자 하며,

제8조(설계변경자문 대상)①위원회 설계변경자문 대상은 다음 각 호에 해당하는 경우 시행한다.

1. 안건별 증감액이 3천만 원 이상인 공사로서 “사업계획변경조정위원회” 심의 대상에서 제외된 안건

○ 캠핑장 운영자가 이용객이 많은 금,토,일요일에는 공사 중지 요청이있었고, 설계변경 자문위원회 자문 및 변경사항을 이행하기 위하여는 공기가 절대적으로 부족하므로 공기를 10일 연장하고자 하며,

○ 공기 연장에 따른 관급자재의 납품기한도 공기에 맞춰 연기하고자 함.

○ 공사기간 변경

- 당   초 : 2018. 10. 4. ~ 12.  2.(60일간)

- 변   경 : 2018. 10. 4. ~ 12. 12.(70일간)

붙임  현황사진 1부.  끝