문서번호	시설보수과-9108
결재일자	2018.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	11/27 김용제
협 조
	주무관			윤동원

『도림천복개(좌안)내진보강공사(장기계속)』

보강물량 및 보강공법 변경 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11

강서도로사업소

시설보수과

『도림천복개(좌안)내진보강공사(장기계속)』

“보강물량 및 보강공법 변경 보고”

Ⅰ		사업개요

구 분	1구역	2구역
공 사 명	도림천복개(좌안)내진보강공사-1구역	도림천복개(좌안)내진보강공사-2구역
공사기간	2018.6.22.∼2019.12.31	2018.6.15.∼2019.12.31
공사개요	기둥보강 95기	기둥보강 100기
도 급 자	㈜범창건설 대표 이덕재	㈜주안이엔씨 대표 유철주
사 업 비	1,539백만원	1,512백만원

Ⅱ		보고내용

□ 보강물량 및 보강공법 변경

○ 현황 및 문제점

- 당초 “1구역” 설계 내역에 내진 보강 물량 95개을 반영하여 발주시행 하였으나,

전체 1구역 구간 중 일부 TYPE 4-1, TYPE 6-1, TYPE 6-2 구간에 대한 교각 N=14개에

대하여 보강공법 변경 추진이 불가피한 실정 임

○ 검토내용

- TYPE 4-1, TYPE 6-1, TYPE 6-2 기둥에 대하여 아래와 같이 물량 변경 과

“CAF공법”으로 변경하여 추진코자하며, 시공은 “2구역” 계약자로 하여금

선 작업 후 추후 설계변경 등 정산조치 코자 함.

〈물량 및 공법 변경 내역〉                    (단위:개)

연번	위치	규격	시공물량 및 보강공법						비고
			당초		변경
			물량	보강공법	물량	보강공법	물량	보강공법
계			24		10		14
1	TYPE 4-1	D= 900mm	10	SRST	4	SRST	6	CAF
		D= 1,200mm	11	SRST	6	SRST	5	CAF
2	TYPE 6-1	D= 900mm	1	SRST	0	-	1	CAF
3	TYPE 6-2	D= 1,200mm	2	SRST	0	-	2	CAF
			1구역		1구역		2구역

○ 개략공사비

- “2구역” N=14개 기둥보강 : 180백만원

Ⅲ		향후 조치계획

□ 상기 보고 및 변경 검토내용에 대하여 감독기관인 서울시설공단에 작업

추진토록 통보하고,

□ 금년 내 사업이 마무리될 수 있도록 사업 추진에 만전을 기하고자 함.  끝.