문서번호	시설과-7323
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	이춘한	전결 11/27 오임석
협 조

서울대공원 화장실 환경개선 전기공사

준공기한 연기 검토 보고

2018. 11.

서 울 대 공 원

시 설 과

서울대공원 화장실 환경개선 전기공사

준공기한 연기 검토 보고

서울대공원 화장실 환경개선 전기공사 시행중 건축 선행공사 지연에 따른 전기공사 기간 연장 검토 보고임

1		관련근거

● 2018년 서울대공원 화장실 환경개선 전기공사 계획[시설과-5584(2018.9.10.)]

● 서울대공원 화장실 환경개선공사 시행계획(수정)[시설과-4993(2018.8.14.)]

2		사업개요

(단위 : 원)

구 분	계 약 명	공사기간	계약금액	계약업체	사 업 내 용
전기공사	2018년 서울대공원 화장실 환경개선 전기공사	2018.10.4. ~ 2018.12.2	20,000,000	****** ****	분전반 교체 공사 전등, 전열설비 공사 등

3		준공기한 연기검토

● 선행 건축공사 시행중 지연으로 인해 전기공사기간 연장이 필요하여 ‘18. 12. 21. 까지 기간 연장하고자 함

● 준공기한 연기내용

구 분	계 약 명	계약자	공사 기간		비고
			변 경 전	변 경 후
전기공사	2018년 서울대공원 화장실 환경개선 전기공사	****** ****	2018.10.4 ~ 2018.12.2	2018.10.4 ~ 2018.12.21	19일 연장

● 지체상금 부과여부 : 미부과

● 공사금액 : 변경없음

4		처리의견

● 공사진행 상황 등 종합적으로 검토한 바 준공기한을 선행 건축공사일정에 맞춰 19일 연기하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

5		행정사항

● ‘18. 11. : 공사 변경계약 의뢰.  끝.