문서번호	설비부-16272
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	유병기	11/27 권오식

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

설계변경(정산) 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

설계변경(정산) 검토 보고

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』설계변경(1차 1회) 및 정산 요청이 있어 아래와 같이 검토 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

㈜삼우공간 제2018-558호(2018.11.27.), 계약금액 변경 요청

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

공사위치 : 서울특별시 금천구 시흥3동 961-5외 8필지

공사기간 : (총차) 2017. 11. 03. ~ 2019. 07. 31.

(1차) 2017. 11. 03. ~ 2018. 12. 31.

공사규모 : 지하1층 ~ 지상5층(연면적 : 5,360.71㎡)

공사내용 : 옥외통신공사 1식, 통합배선공사 1식 CCTV 설치공사 1식 등

도 급 비 : (총차) 493백만원, (1차) 45백만원

시 공 사 : (주)엔트립

감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소 외 1개사

[위 치 도]	[조 감 도]

Ⅲ		검토내용

설계변경(정산) 내용

❍ 통신공사(1차) 물량 조정

❍ 통신공사(1차) 정산(보험료 등)

설계변경(정산) 사유
❍ 공사현장 민원발생 및 가시설 터파기공사의 암판정과 공법변경에 따른        건축공사 공기지연에 따른 공정 변경으로 통신공사 1차수 물량 조정 반영

❍ 통신공사(1차) 준공 처리를 위한 보험료 및 산업안전보건관리비 미사용분 정산

주요 변경(정산) 사항

공 정 명	당 초	변 경	증ㆍ감액	비 고
1. 옥외통신설비공사	1,038,646	1,518,124	증)479,478	통신공사 1차수 물량 조정
2. 통합배선설비공사	6,883,138	140,474	감)6,742,664
3. CATV설비공사	2,572,010	0	감)2,572,010
4. 방송설비공사	5,447,221	0	감)5,447,221
5. 비상벨설비공사	4,744,891	0	감)4,744,891
6. 출입통제설비공사	2,808,908	0	감)2,808,908
7. CCTV설비공사	1,940,649	0	감)1,940,649
8 주차관제설비공사	845,307	0	감)845,307
국민건강보험료	410,396	0	감)410,396	보험료 미사용분 정산
노인장기요양보험	26,880	0	감)26,880
국민연금보험료	601,110	0	감)601,110
퇴직공제부금	555,242	0	감)555,242
산업안전보건관리비	770,026	0	감)770,026

공사계약 변경 사항

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
계약기간	총차	2017.11.03.~ 2019.07.31.	2017.11.03.~ 2019.07.31.	변경없음
	1차	2017.11.03.~ 2018.12.31.	2017.11.03.~ 2018.12.31.	변경없음
계약금액	총차	492,710,120원	492,710,120원	변경없음
	1차	45,000,000원	3,759,000원	감)41,241,000원

감리단 검토의견

❍「남부도로사업소 청사 신축 통신공사(장기-1차)」계약금액 변경 요청을 검토한 결과 통신공사 업체에서 요청한 통신공사(장기-1차) 계약금액 설계변경은 적합한 것으로 사료됨.

Ⅳ		검토의견

책임 건설사업관리기술자가 검토한 통신공사(1차) 설계변경 및  정산 내용이 적합한 것으로 판단되어 총무부에 설계변경 계약을 의뢰하고자 함.

Ⅴ		향후계획

2018.11.: 통신공사(1차) 설계변경(정산)
2018.12.: 통신공사(1차) 준공검사
2019.01.: 통신공사(2차) 발주

붙임  감리단 공문 1부.  끝.