문서번호	설비부-16278
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	11/27 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 통신공사』

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 통신공사』

설계변경(총차1회, 1차1회) 검토보고

『남산예장자락 재생사업 통신공사』관련 기 실정보고 승인한 소방재난본부 리모델링 추가 공사에 대한 설계변경 서류가 접수되어 검토보고함.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 남산예장자락 재생 통신공사

□ 규     모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

□ 공사기간 : `17.08.01~`19.12.31(1차:`17.8.1~`18.11.30)

□ 공 사 비 : ************************

□ 시 공 사: ㈜한일이앤에스

□ 감 리 사: ㈜동성엔지니어링

□ 공 정 률 : 13%(소방재난본부 리모델링 진행)

2		관 련 근 거

□ 남산예장감리 제2017-52호(`17.11.13)

- 주공종 소방재난본부 리모델링에 따른 통신공사 내용 보고

□ 남산예장감리 제2018-170호(`18.06.11)

- 리모델링 범위 확대에 따른 통신공사 내용 보고

□ 남산예장감리 제2018-400호(`18.11.27)

- 통신공사 설계변경 검토보고

3		설계변경 내용

□ 변경사유 : 당초 본 사업의 범위에 소방재난본부 리모델링이 없었으나, 주공종(토목,건축)에서 리모델링 진행하여 통신공사 내용 추가

□ 공종별 변경내용

□ 총차공사(소방재난본부 리모델링 추가)

공 종	추가공사 내용	변경사유	변경금액 (직접비)
옥외통신설비	·기존 옥외 CCTV 설치 3대 ·기존 옥외 CCTV POLE 설치 2본 ·CCTV배관배선 물량 증가	·옥외 주차장 철거 후 재구획에 따라 CCTV재설치	증)1,411천원
옥내통신설비	·CCTV 재설치 5개 ·모듈라잭(2구) 5개 ·IDF단자함 2대 ·스피커 설치 19개 ·통신설비용 배관배선 증가	·소방재난본부 리모델링(기존 철거 후 신설)에 따른 설치	증)22,699천원
철거공사	·CCTV철거(재사용) 8대 ·인터폰 철거(재사용) 1대	〃	증)348천원
<직접비 소계>			증)24,458천원

□ 1차공사(다음차수와 내역 변경)

공 종	변경내용	변경사유	변경금액 (직접비)
통합배선 설비	·1차 계약물량 다음차수로 이월	·선행공정 공사일정에 따라 1차공사 기간내 시공 불가	감)8,442천원
CATV설비	〃	〃	감)1,988천원
방송설비	〃	〃	감)8,211천원
CCTV	〃	〃	감)10,970천원
소방재난본부 리모델링	·소방재난본부 리모델링 시공물량 반영	·원활한 예산 집행 위하여 시공가능 물량을 1차공사 반영	증)24,458천원
<직접비 소계>			감)7,153천원

□ 단가산정 기준

구분	반영내용	관련근거
감소물량	없음	공사계약일반조건 제7절 제1호 나항(계약상대자의 책임없는 사유)
증가물량	신규단가에 낙찰률(87.748%) 적용
신규비목	〃

□ 계약금액 변경 내용

구분	당초	변경	증감액
총차	*************	*************	*************
1차	************	************	*************

4		보고자 의견

□ 위 설계변경 사항은 기 실정보고 승인된 사항으로 건설사업관리자가 검토한 단가 및 물량산출에 대한 내용이 적정하다고 판단되므로 설계변경 추진하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서(총차,1차) 각 1부.

3)제비율 검증확인대장 1부. 끝.