기성부분 검사(감독)조서(3차분2회)

문서번호	시설과-11086
수 신 자	재무회계과장
접수번호

결재	주무관		시설과장		시설안전부장
		최이영		송병욱		11/27 이규상

공 사 명	국사봉배수지 건설공사(3차분 2회)
문 서 번 호	대한(상수도)2018-117호					계 약 자				청광종합건설(주) 대표 허 숭 외 2개사
계 약 금 액	금4,445,000,000원(금사십사억사천오백만원)
기 성 금 액	금1,051,000,000원(금일십억오천일백만원)
계약 년월일	2017년 12월 29일					준공 예정일				2018년 12월 31일
착공 년월일	2018년 01월 01일					기성 청구일				2018년 11월 21일
기성 검사일	2018년 11월 23일					이 행 기 간				2018.09.11~2018.11.21
기성내역	전회까지 기성금액		금 회 기성금액				금회까지 누계금액					금회지급후 남은 금액
	￦1,072,000,000		￦1,051,000,000				￦2,123,000,000					￦2,322,000,000
위 공사에 대한 감독 및 기성검사를 마쳤는 바 공사 설계서와 도면 및 규격서(시방서) 기타 계약조건의 내용과 같이 기성되었기에 본 조서를 제출함.
2018년 11월 27일
기성검사자		기 술 지 원 건설사업관리기술자			토 목 시 공				성명		서 관 석
					토질 및 기초				성명		하 상 귀
입 회 자		(주)대한콘설탄트			책임건설사업관리기 술 자				성명		유 성 수
		청광종합건설(주)			현 장 대 리 인				성명		임 재 현
		공 사 관 리 관			시 설 안 전 부				성명		최 이 영
서울특별시상수도사업본부(분임)재무관 귀하

	시설안전부장