투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 변경 계약 의뢰(서울바이오허브 조성 전기공사_신관동 수배전반)

우리 본부에서 시행중인「서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사」 신관동에 설치하는 관급자재(수배전반)에 대하여, 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

(1) 계약건명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 전기공사(신관)_수배전반 구매설치

(2) 계약번호 : ***********

(3) 계약금액 : *************(조달수수료 별도)

(4) 계약일자 : 2018.04.09.

(5) 계 약 자 : ***************

나. 계약금액 변경내용

구 분	당 초	변 경	증,감액	비고
수배전반	*************	*************	**************

- 변경사유 : 신관동 평면변경에 따른 물량변경(MCC반 1면 추가)

- 납품기한 : 변경 없음(2019.01.31.)

붙임 : 1. 관련 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	설비부장
주무관	손영일		시책사업과장	임병국		설비부장	11/27 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-16275	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스B/D 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8650	/전송	02-3708-8659	/	zerone@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)