문서번호	누수방지과-10969
결재일자	2018.11.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		누수방지과장	시설안전부장
최환수		유승효	11/27 이규상
협조
	주무관		차경호

『취·송수 및 공정 유량계 교정검사 용역』 설계변경(정산) 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

시설안전부

(누수방지과)

『취․송수 및 공정 유량계 교정검사 용역』

설계변경(정산) 보고

2018년 취․송수유량계 교정검사용역 수행 중 과업물량 변동내역에 대하여 설계변경(정산)을 시행하고자 보고 드림.

계약현황

❍ 사 업 명 : 2018년 취․송수유량계 교정검사 용역

❍ 용역개요 : 취․송수 및 공정유량계 118대 (취․송수 64대, 공정 48, 휴대용 6)

❍ 계 약 자 : ㈜윈스코 대표 박성덕

❍ 계약금액 : 89,734,540원

❍ 계약기간 : 2018. 4. 10. ~ 2018. 12. 20.

설계변경 개요

❍ 계약금액 변동현황

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
총 용역비	89,734,540	83,575,540	감) 6,159,000	물량변경

❍ 설계변경 사유 (세부사항)

- 교정물량 감소 : 118대 → 111대

- 교정대상 구경 변경에 따른 금액 감소

공 종	규 격	단가	물량변동		계약금액		증감	비고
			당초	변경	당초	변경
유량계 교정검사	1,000㎜ 미만	612,402	4	7	2,449,608	4,286,814	1,837,206
유량계 교정검사	2,000㎜ 미만	656,145	39	36	25,589,655	23,621,220	-1,968,435
유량계 교정검사	2,000㎜ 이상	743,631	69	62	51,310,539	46,105,122	-5,205,417
휴대용 교정검사	초음파 공장교정	316,936	6	6	1,901,616	1,901,616	0
환풍기	220V, 125×125	13,122	20	0	262,440	0	-262,440
보고서	A4 보고서	10,500	6	6	63,000	63,000	0
계(교정물량)					81,576,858	75,977,772	-5,599,086
부가세					8,157,685	7,597,777	-559,908
합 계					89,734,540	83,575,540	-6,159,000	원단위절사

❍ 계약 물량 변동 주요사항

- 뚝도 공정유량계 3개소 : 개수로 타입으로 비교측정 불가 (물량 3개 감소)

- 암사 공정유량계 1개소 : 환경적 요인(곡관, 펌프인접등)으로 비교측정 불가(물량 1개 감소)

- 기타 중복물량  3개소 : 물량 중복 산정으로 제외 (물량 3개 감소)

❍ 예산과목

- 시설안전부 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,수선유지비

[유량계 교정검사 및 유지보수]

- 생산부    : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

[정수장 시설 유지보수]

보고자 의견

❍ 2018년 취․송수유량계 교정검사 과업물량 증․감분에 대하여 설계변경 정산을 시행하고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 내역서(정산) 1부.

2. 합의서 1부.  끝.