＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰 (준공기한 연기 : *** 배수지외 14개소 정밀안전진단 용역)

우리사업소에서 시행중인『***********************************』에 대하여 준공기한을 별첨과 같이 연기결정하고, 그 결과에 따라 아래와 같이 변경계약 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : ***********************************

나. 계약자 : ***************

다. 계약금액 : *******************

라. 계약기간

1) 당초 : 2018.05.09. ~ 2018.11.30.

2) 변경 : 2018.05.09. ~ 2018.12.15.

마. 연기사유 : 본청 기술심의시 위원들로부터 추가시험 및 측정 요청에 따라

시험 및 측정에 필요한 절대공기 부족

바. 지체상금 부과여부 : 미부과

사. 선금지급여부 : 지급

따로붙임 : 1. 준공기한 연기결정 보고서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	급수운영과장
주무관	양재덕		급수설비팀장	김찬모		급수운영과장	11/27 이병운
협조자
시행	급수운영과-21876	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-3644	/전송	02)3146-3689	/	yangjd218@seoul.go.kr	/	부분공개(7)