투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 변경계약 의뢰

1.『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』과 관련하여 변경계약(총괄 1회, 1차 2회)을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

나. 계약금액 : 총괄 16,339,843,000원

1 차 13,336,000,000원

다. 공사기간 : 총괄  2017. 09. 13 ∼ 2019. 11. 12

1 차  2017. 09. 13 ~ 2018. 12. 10

라. 시공업체 : 엘림토건(주) 대표 이종만 외 2

마. 변경사유 : 물가변동 및 현장여건 변동 등에 따른 계약금액 조정

바. 변경내역

(단위 ; 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
계약 금액	총괄	16,339,843,000	17,338,229,000	증) 998,386,000
	1차	13,336,000,000	5,202,139,000	감)8,133,861,000
공사 기간	총괄	2017.09.13 ∼ 2019.11.12	2017.09.13 ∼ 2019.11.12	-
	1차	2017.09.13 ∼ 2018.12.10	2017.09.13 ∼ 2018.12.10	-

사. 예산과목 : (공기업하수도사업특별회계) 물순환안전관, 물재생시설과, 자본적지출, 비가동설비자산취득, 건설중인자산, 시설비 및 부대비, 시설비, 물재생시설개선, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치

붙임  1) 방침서 1부.

2) 변경내역서(총괄) 1부.

3) 변경내역서(1차) 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
전문관	조양호		환경시설과장	장수철		방재시설부장	11/27 이임섭
협조자	경리과장	이현숙
시행	방재시설부-15095	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8784	/전송	02-3708-8756	/	cyh2466@seoul.go.kr	/	대시민공개