투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(돈화문 민요박물관 건립 통신공사) 총차1회, 1차1회

우리 본부에서 추진중인 『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경(총차1회, 1차1회) 계약의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 돈화문 민요박물관 건립 통신공사(장기-1차)

2. 공사기간 : 2018.01.10.~ 2019.07.09.

3. 계 약 자 : 셀렉트정보기술㈜

4. 설계변경 내용

(금액단위 : 원)

구분		변경전	변경후	비 고
공사기간	총차	`18.01.10~`19.07.09	`18.01.10~`19.07.09	변동사항없음
	1차	`18.01.10~`18.11.30	`18.01.10~`19.04.30	증)151일
계약금액	총차	193,985,500	211,216,000	증)17,230,500
	1차	50,000,000	79,173,000	증)29,173,000

5. 설계변경 사유 : 사업주관부서의 건축평면 계획변동으로 인한 수량변경,재배정 예산 잔액분 집행을 위한 잔여물량 중 일부를 1차공사에 반영 및 주공정 공사 예정 공정과 일치하기 위한 1차공사에서 장래분으로 내역변경

6. 예산과목 : 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 돈화문 전통문화시설 건립, 시설비.

붙임  1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 합의서 및 관련문서 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김진수		건축설비과장	김은덕		설비부장	11/27 권오식
협조자	★경리과장	이현숙
시행	설비부-16231	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)