문서번호	시설과-3031
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
여은솔	김영균	진병규	11/28 안수연
협 조

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

현장 실정사항 검토 보고

2018. 11.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」

현장 실정사항 검토 보고

「보라매공원 테마 물놀이터 조성공사」와 관련, 접수된 실정보고서를

검토하고 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

○ 공사감독3처-12751(2018.11.26.) : 공사 실정보고 승인요청

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 정비공사

○ 공사기간 : 2018. 9. 10. ~ 2018. 12. 8.

○ 도 급 액 : 금260,933,900원(금이억육천구십삼만삼천구백원)

○ 도 급 자 : 나원이엔지(주) 대표 장경규

○ 공사내용 : 물놀이형 수경시설 및 기계설비 설치 등

□ 실정사항 검토

○ 발주처 요청사항

구 분	발주처 요청사항	검토 내용	비 고
식재 공사	◼기계실 주변 녹지대 토사유실 방지 및 경계식재 연장을 위해 잔디, 회양목 식재	◼잔디 및 회양목 식재 물량 반영 ▸잔디(0.18×0.18×0.03): 0㎡ → 150㎡ ▸회양목(H0.3×W0.3): 0주 → 100주	승인 시설과-2944호 (2018.11.19.)
시설물 공사	◼시설물 이용안내 및 이용수칙을 표시한 안내판 필요	◼시설물 안내판 물량 반영 ▸안내판(600×900): 0개 → 2개	※관급자재 시설과-3001호 (2018.11.26.)

○ 현장 실정사항

구 분	현황 및 문제점	검토 내용	비 고
철거 공사	◼기존 점토블록포장 노후로 인해 수경설비 철거 및 신규설치시 파손 우려	◼블록포장구역 철거 물량 반영 ▸블록포장(철거, T50): 25.5㎡ → 450㎡	승인
	◼기존 수경설비 철거 및 신규 기계실 설치를 위해 기존수목 이식 등 필요	◼지장수목 이식 및 제거 물량 반영 ▸수목이식(산수유,R12): 0주 → 3주 ▸수목이식(모과나무,R24): 0주 → 1주 ▸수목이식(리기다소나무,R44): 0주 → 1주 ▸관목이식(H0.3~0.7): 0주 → 240주 ▸수목제거(은행나무,B40): 0주 → 1주
	◼기존 시설물 철거 후 폐기물 상차 부분 누락	◼폐기물 상차 물량 반영 ▸폐기물상차(굴삭기0.6㎥): 0㎥ → 86㎥
시설물 공사	◼공원이용객 보행안전 확보를 위한 시설물 설치 필요	◼가림막휀스 설치 및 해체 물량 반영 ▸가림막휀스설치및해체(H1.8*3.0,3개월): 0경간 → 62경간	승인
포장 공사	◼현장내 재활용 가능한 자재 재검토 필요	◼점토블록 재활용 및 신규 설치 물량 반영 ▸점토블록포장(재활용,230×115×T50): 25.5㎡ → 0㎡ ▸점토블록포장(재설치,230×115×T50): 0㎡ → 350㎡ ▸점토블록포장(신규,230×115×T50): 0㎡ → 100㎡ ◼측구수로관 신규 설치 물량 반영 ▸측구수로관(W300×T70): 0개소 → 5개소	승인
	◼품질향상을 위해 수조A 곡선부(R4.4)의 경계석은 곡선자재로 변경 설치 필요	◼수조A 곡선부 경계석 자재 변경(직선→곡선) ▸화강석경계석(100×100×1000): 96.5m → 74m ▸화강석경계석(곡선,100×100×1000): 0m → 22.5m

□ 예산 검토

○ 공사비 변경내역(개략금액)

구 분		금 액(원)		증 / 감 (원)		비 고
		당 초	변 경
총공사비		324,450,040	348,373,900	증	23,923,860
도급비	공급가액	237,212,637	256,292,728	증	19,080,091
	부가세	23,721,263	25,629,272	증	1,908,009
	계	260,933,900	281,922,000	증	20,988,100
관급자재비		63,516,140	66,451,900	증	2,935,760

○ 예산내역

구 분	예산액	집행액				비 고
		품의액 (a)	계약액 (b)	낙찰차액 (c=a-b)	관급자재
물놀이터 조성공사	370,000,000원	296,276,860원	260,933,900원	35,342,960원	63,516,140원	폐기물용역 10,200천원

- 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 실정보고 사항에 대하여 시공하고 추후 설계변경 시 반영.

○ 도급비 증액분은 낙찰차액을 활용.

붙   임 : 1. 서울시설공단 실정보고서 1부.

2. 개략공사비 내역서 1부.  끝.