문서번호	물순환연구과-9085
결재일자	2018.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
장신요	안진	최영준	11/28 이인근
협 조
	물재생시설과장		이철범
	물재생시설팀장		이웅희
	물재생운영팀장		정훈모
	운영과장		최영효
	운영과장		최종인

하수처리의 양적 균등 분배 현장적용 연구 계획

2018. 11.

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	물순환안전국 중랑, 난지 센터
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

하수처리의 양적 균등 분배 현장적용 연구 계획

하수처리의 양적 균등 분배를 위한 본청, 센터, 연구원의 협업을 통해 4개 센터 현장적용방안을 마련하여 처리효율 및 경제성을 확보하고자 함

□ 사업개요

○ 서울시 하수처리는 대규모로 많은 생물반응조 및 침전지로 구성

- 중랑(4처리, 104지), 난지(2처리, 24지), 탄천(2처리, 48지), 서남(2처리, 84지)

○ 지별 편차의 해소는 처리효율 및 경제성을 향상시킬 수 있는 과제

○ 추진기간 : ’18.11. ~ ’19.8.(10개월)

□ 물재생센터 현황

○ 시간대별 유입량 변동으로 균등 분배 어려움

- 유량조정조의 설치가 필요하나 막대한 비용이 소요되어 신중한 접근 필요

○ 지별 균등 분배의 한계성

- 유입수문, 공기밸브 등 수동조절이 필요하나 인력부족 한계

- 유량계 및 전동밸브 설치로 자동화 가능하나 막대한 비용 소요

○ 현장시설의 구조적 문제에 대한 개선 필요

- 지별 편차를 야기하는 구조적 문제에 대한 단계적인 해결 필요

○ 균등 분배의 상태를 감시할 수 있는 모니터링 설비의 부족

- 지별로 생물반응조의 상태를 판단할 수 있는 분석 장비 필요

- 기존 측정기와 유지관리를 고려한 전 공정 모니터링 시스템 구성 필요

□ 추진방향

○ 양적 균등 분배를 위한 현상 진단 및 현장적용방안 마련

○ 연구원과 본청·센터 경험 많은 전문가 위주로 TF팀 구성

○ 주기적인 TF팀 회의 및 전문가 자문 추진

□ 균등 분배 방안 : 2017년 현안업무로 방안 마련

○ 질소, 인 처리 기반의 지별 편차 관리

- 하수고도처리 MLE공법 최적화 연구(’15.2. ~ ’16.12.)

- 지별 편차 관리로 질소, 인 처리효율 19% 이상 향상

- 평상시 일차침전지를 유량조정조로 활용 방안 검토

○ 4개 센터 지별 질소, 인, 염소 분포조사

- 총인 응집제 투입기준 작성의 가이드라인 제시 및 현장실험 등 기술지원(’17.1. ~ ’17.12.)

- 공기공급량, 응집제투입량, 유입량 등의 양적 균등 분배 필요

○ 하수고도처리 MLE공법 최적 운영매뉴얼 작성 및 배포(’17.1. ~ ’17.12.)

- 현장 지별 편차를 고려한 최적조건 적용 방법 제시

- 지별 질소, 인, 염소 분포 실험 → 지별 공기공급량, 응집제투입량 제어방법 제시

- 전기전도도, DO 등 계절별 최적조건 설정 방법 제시

○ 양적 균등 분배 모니터링을 위한 전기전도도 활용방안 제시

- “전기전도도를 활용한 지별 편차 감소 방안” 소통한마당 발표(’18.4.)

- “전기전도도 측정을 통한 하수 중 생물학적 질소 연속 제거 공법” 특허출원

- 지별 편차를 쉽게 판단할 수 있는 전기전도도 활용방안 제시

□ 고려사항

○ 양적 균등 분배를 위한 일반적인 고려사항

	하수 유입량의 시간대별 관리
	지별 유량 균등 분배 관리
	공기 공급량 지별 균등 분배 관리
	반송 유량 균등 분배 관리
	응집제 투입량 균등 분배 관리
	균등 분배를 위한 모니터링

□ 추진방법 : TF팀 구성하여 현장 적용성 검토 후 방안 마련

○ TF팀 구성(안)

- 서울물연구원(13명)

· 서울물연구원장, 수도연구부장, 물순환연구과장, 신풍식, 장신요 등

- 4개 센터(15명)

· 중랑물재생센터 : 운영과장, 운영팀장(1), 현장반장(1), 연구사(2)

· 난지물재생센터 : 운영과장, 운영팀장(1), 현장반장(1), 연구사(2)

· 탄천물재생센터 : 수처리사업부장, 운영부장, 연구소장

· 서남물재생센터 : 수처리운영부장, 수질과장

- 본청 물재생시설과(4명)

· 물재생시설팀장, 담당자

· 물재생운영팀장, 담당자

													TF팀 운영
서울물연구원 (물순환연구과)														4개 물재생센터 (중랑, 난지, 탄천, 서남)																본청 (물재생시설과)
수도연구부장, 물순환연구과장, 신풍식, 장신요 등 물순환 연구과 직원														중랑			운영과장, 운영팀장, 현장반장, 연구사(2)												물재생시설팀장, 물재생운영팀장, 담당자(2)
														난지			운영과장, 운영팀장, 현장반장, 연구사(2)
														탄천			수처리사업부장, 운영부장 연구소장
														서남			수처리운영부장, 수질과장

○ TF팀 업무 : 현장 적용성 검토

○ 외부전문가 자문단 구성(안)

- 대학교수: 서울시립대 한인섭교수(환경), 이광훈교수(유체)

- 대양엔바이오 이학범, ㈜이산 김영록

- 선진엔지니어링 김태선, ㈜삼보기술단 도중호

□ 추진계획

○ 현장적용방안 마련을 위한 TF팀 회의 개최(’18.12.)

- 현장에서 발생하는 애로점을 조사 및 발굴

- 본청, 센터, 연구원의 협업을 통한 양적 균등 분배 방안 마련

○ 외부 전문가 그룹 등 자문단 구성 및 자문회의 개최(’19.1.)

- 양적 균등 분배 방안에 대한 의견수렴 및 전문가 검증

○ 양적 균등 분배를 위한 현장적용방안 중간보고서 작성 및 전파(’19.3.)

○ 현장 적용성 고려한 최종보고서 작성(’19.8.)

- TF팀 및 외부전문가 의견을 수렴하여 최종보고서 작성

□ 기대효과

○ 본청, 센터, 연구원의 충분한 협업을 통한 현장 적용성 증가

○ 양적 균등 분배를 통한 지별 편차 감소로 하수처리 효율 및 경제성 향상