문서번호	치수과-3803
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		신용철	11/28 전영주
협 조
	총무과장			박병현
	기획예산과장			문영일
	주무관			김경화

『가양 나들목 개선공사』

설계변경(1 회) 및 준공기한 연기보고

2018. 11.

『가양 나들목 개선공사』

설계변경(1 회) 및 준공기한 연기보고

Ⅰ				공사개요

❍ 공사내용 : 승강기 설치, 계단경사 조정(26〬→21〬), 내부통로 타일벽화

❍ 공사기간 : ‘18. 4.16 ~11.30

❍ 계약업체 : 주식회사 대명이십일 김명회

❍ 계약금액 : 5.2억원

Ⅱ				보고내용

❍ 설계변경사유 : 신규공정 및 물량 증감 반영

- 지장 콘크리트 슬라브 철거 및 재정비(치수과-2399, ‘18.07.06)

․저촉된 차집관거 부속 구조물(13.7×5.0×10.6) 철거 및 마감정비 시행

- 내부통로 타일벽화 및 승강기 외부시설 도급전환(치수과-3107, ‘18.09.12)

․주민참여 제안자 요청사항을 반영하여 겸재정선(8점) 타일벽화 제작설치

․승강기 외부시설(H빔, 강화유리) 조달계약 불가로 도급계약하여 설치

- 주요 공종 수량 증감 반영

․강서구청 의견반영 조경식재 및 안전휀스 설치(공원녹지과-9467. ‘18.5.29)

․제내지 보행로 화강석 판석 포장→투수블럭 포장 변경

․승강기 및 보안등 전기관 매설 도로굴착 복구

❍ 설계변경 내역

- 공종별 수량 증․감 현황

공종	단위	당 초	변 경	증․감		비고
타일벽화(겸재정선)	점	-	8	증	8	25㎡
지장물 철거	식	-	1	증	1
승강기 외부 프레임	식	-	1	증	1	24인승
조경식재(교목 등)	주	2,918	3,385	증	473
진입로 포장	㎡	273	268	감	5	재질변경
도로굴착복구	식	-	1	증	207
폐기물 처리	㎥	36	154	증	118

- 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감		비고
총공사비	900,000,000	756,100,000	감	143,900,000
도 급 비	520,577,000	652.200,000	증	131,623,000
관 급 비	207,474,110	101,918,910	감	105,555,200
이 설 비	171,848,883	1,981,090	감	169,967,800

Ⅲ				조치의견

❍ 상기와 같이 설계변경 시행하여 가양 나들목 개선공사 업무에 만전을 기하고자 함.(신규공종은 설계단가에 낙찰율 87.865% 적용)

- 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강접근체계개선, 한강공원 나들목 환경개선(시민참여), 시설비(증 131,623천원)

Ⅳ				준공기한 연기

❍ 당    초 : 2018.04.16.~2018.11.30.

❍ 변    경 : 2018.04.16.~2019.03.31.

❍ 연장사유

- 지장물(차집관거 부속 구조물) 저촉 및 주민참여 제안자 요청사항 반영 등 공사 지체요인 발생으로 공사기간 연장이 필요하며,

- 예산집행율이 70%미만으로 잔여예산 집행을 위한 공사기한 연장이 필요.

❍ 귀책소재 : 한강사업본부

❍ 지체상금 : 미부과

붙임 : 1. 설계변경(정산) 도서 1부

2. 설계변경 자문 심의결과 보고서 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.