문서번호	기전과-6902
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박신범		11/28 代김기중
협조

『2018년 동부 횡단보도 확충 교통신호기공사』

실 정 보 고  검 토  보 고

2018. 11.

동부도로사업소

(기전과)

『2018년 동부 횡단보도 확충 교통신호기공사』

실 정 보 고  검 토  보 고

『2018년 동부 횡단보도 확충 교통신호기공사』와 관련하여 감리업체로부터 제출된 실정보고 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1. 관련근거

❍ 2018년 동부 횡단보도 확충 교통신호기공사 실정보고 건[태영(신) 2018-103(2018.11.28.)]

2. 공사개요

❍ 공 사 명: 2018년 동부 횡단보도 확충 교통신호기공사

❍ 공사위치: 송파구 잠실2동주민센터, 웃말공원 앞

❍ 공사내용: 횡단보도 신설에 따른 교통신호기공사 1식

❍ 계약업체: ㈜백광이엔씨 대표 이돈식

❍ 계약금액: 금187,863,200원(금일억팔천칠백팔십육만삼천이백원)

❍ 계약기간: 2018. 8. 31. ~ 2018. 11. 30.

3. 실정보고 내용

공사위치	현황 및 문제점	감리 의견	검토결과	비고
잠실2동주민센터	․ 횡단구간 중 신설 중앙보도 핸드홀 내역에 없음 ․ 공사용 안내간판, 공사용 안내표지 정산	․ 핸드홀 추가 설치 반영(H6) ․ 공사용 안내간판 1EA, 안내표지판 1EA 반영	적정
웃말공원	․ 전원선 신설 인입점 변경으로 물량 조정 ․ P4 지주에 근접한 가로등을 통합 ․ 공사용 안내간판, 공사용 안내표지 정산 ․ 디자인지주 차량용 보호금구 설계 누락	․ 전원선 신설 가공 80m 물량 삭제 ․ 기존가로등 R2 철거 삭제, P4 지주에 근접한 가로등 철거 반영 ․ 공사용 안내간판 1EA, 안내표지판 1EA 반영 ․ 디자인지주 차량용 보호금구 8조 변경 반영	적정
기 타	․ 폐기물 처리비용 반영 필요 ․ 가로등 통합풀용 암대 설계 누락	․ 폐기물 처리비 반영 ․ 가로등 통합폴용 암대 설계 반영	적정

4. 조치의견

❍ 감리업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정하다고 판단되어 실정보고를 승인하고자 함.

붙  임 : 실정보고 제출건 1부.  끝.