투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	실내공기질 개선 공사 관련 제1AF관 공사일정 변경 요청

1. 시설과-5901(2018.09.20.)호와 관련입니다.

2. 『서울대공원 동물사 실내공기질 개선 공사』와 관련한 제1AF관 공사 일정이 동절기 동물 사육관리에 어려움이 있어 아래와 같이 변경요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

변경 요청 사유

- 제1AF관은 기린, 얼룩말, 겜스벅 등 성격이 예민한 동물로 하절기에는 외부 방사장에서

생활하나, 동절기에는 따듯한 내실로 이동하여 사육관리하여야 되므로

- 기린, 얼룩말, 겜스벅 등은 소리와 작은 움직임에도 민감하게 반응을 보이며, 넓은

방사장에서도 사육사의 작은 소리와 움직임에도 놀라 달아나다 안전휀스 등에 부딪쳐

안전사고가 발생하는 경우도 있어

- 동절기 내실에서 사육관리 중에 공사를 진행할 경우 비좁은 공간에서 소음 등으로 인한

스트레스로 동물의 안전사고 발생이 우려가 되어

- 동물이 외부 방사장으로 이동한 4월 이후로 공사 일정을 변경요청함

끝.

	동물복지2과장
주무관	이재황		동물복지2과장	11/28 송부용
협조자	주무관	박석현
시행	동물복지2과-4521	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/
전화	02-500-7750	/전송	02-500-7996	/	jaehwang66@seoul.go.kr	/	대시민공개