“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰(서울시 방재성능 분석 및 예측시스템 개선방안 용역)

1. 하천관리과-13336(2018.9.17)호와 관련입니다.

2. 서울시 방재성능 분석 및 예측시스템 개선방안 용역에 대하여 아래와 같이 변경계약을 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울시 방재성능 분석 및 예측시스템 개선방안(기본계획) 용역

나. 계약업체 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

다. 계약변경내용

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총 용 역 비		950,000,000	1,000,000,000	증 50,000,000
	공 급 가 액	863,636,364	909,090,909	증 45,454,545
	부가가치세	86,363,636	90,909,091	증 4,545,455

라. 계약변경 사유

- `18.8.28. 기습폭우로 침수피해가 많이 발생한 4개 자치구에 대하여 신속한 원인분석 및 대책방안 등을 마련하고자 본용역으로 추진하고, 이에 소요된 비용을 반영하고자 계약변경.

붙임 : 1. 관련방침서 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	하천관리과장
주무관	안덕용		치수계획팀장	박홍봉		하천관리과장	11/28 손경철
협조자	주무관	진학성		계약1팀장	조현
시행	하천관리과-17054	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3864	/전송	02-2133-1044	/	ahndy@seoul.go.kr	/	부분공개(5)