＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	계약변경 시행 및 의뢰(영등포정수센터 탈수기 개량 배관공사)

우리 부에서 시행중인 ‘영등포정수센터 탈수설비 개량 사업’과 관련하여 아래와 같이 계약사항 변경을 시행 및 조치 요청합니다.

1. 계약현황

가. 건    명 : 영등포정수센터 탈수기 개량 배관공사

나. 계약대상 : 영풍진흥기업(주)  (대표:김광남, 등록번호:1068108518)

다. 계약기간 : 2018.07.02.~2018.12.20.

라. 계약금액 : 금231,464,300원

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,정수장시설정비,시설비및부대비(시설비)

2. 계약변경 내역

가. 계약금액 : 증)22,492,360원

∙ 당초 : 금231,464,300원(금이억삼천일백사십육만사천삼백원)

∙ 변경 : 금253,956,660원(금이억오천삼백구십오만육천육백육십원)

나. 계약기간 : 변경없음

붙임 1. 변경 보고서          1부.

2. 변경내역서 및 도면 각1부.

3. 합의서               1부.  끝.

	생산부장
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	11/28 代한희선
협조자	주무관	정혜원		주무관	代전혁
시행	기전설비과-9163	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(7)