문서번호	하천관리과-17056
결재일자	2018.11.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장	물순환안전국장
조현범	민형일	손경철	11/28 배광환

지방하천 제방 정밀점검 용역

설계변경(정산) 검토 보고

2018.  11.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

지방하천 제방 정밀점검 용역

설계변경(정산) 검토 보고

『지방하천 제방 정밀점검 용역』과 관련하여 용역 준공에 따른 설계변경(정산) 사항을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지방하천 제방 정밀점검 용역

○ 용역기간 : 2018.4.09. ~ 2018.11.30.(236일)

○ 용 역 사 : ㈜한국재난연구원 외 1개사(케이에스엠기술(주))

○ 용 역 비 : 307,000천원

○ 과업내용

- 과업대상 : 홍제천 등 21개 하천제방 좌․우안(159km)

- 자료수집 및 분석, 현장조사 및 시험

- 상태평가, 보수․보강 및 유지관리 방안 제시

- 안전점검 편람 재정비 및 주요결함 일상점검매누얼 작성

□ 추진경위

○ ’18. 2.20. : 용역 발주

○ ’18. 4.20. : PQ 심사

○ ’18. 4.09. : 용역 착수

○ ’18. 4.~8. : 현장 조사 및 시험 시행

○ ’18. 9.21. : 중간보고회 및 자문회의 개최

○ ’18.11.26. : 최종보고회 개최

□ 설계변경(정산) 검토

○ 설계변경 사유 : 정밀점검 용역 완료에 따른 자문비 정산

○ 설계변경 내역 : 감 1,980천원

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
계약금액	307,000,000	305,020,000	-1,980,000
점검비	276,990,909	276,990,909	-
2. 자문비	2,100,000	300,000	-1,800,000
3. 부가가치세	27,909,091	27,729,091	-180,000

□ 향후계획

○ ’18.11.30. : 설계변경(정산) 및 용역 준공

붙 임 : 설계변경(정산)

내역서 1부.  끝.