문서번호	도시철도계획부-9621
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	경전철설계과장		도시철도계획부장		도시철도국장		도시기반시설본부장
장기철	강명석		김진팔		박상돈		11/29 한제현
협 조
	도시철도사업부장					박동룡
	도시철도건축부장					박은섭
	도시철도설비부장					구자훈

신림선 경전철 민간투자사업

실시계획 변경(3차) 승인(안) 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

신림선 경전철 민간투자사업

실시계획 변경(3차) 승인(안) 보고

「신림선 경전철 민간투자사업」관련 설계변경이 확정된 사항과 시점부 노선변경에 대한 도시계획시설 변경결정을 반영한 실시계획 변경(3차) 승인(안)을 아래와 같이 승인하여 원활히 추진코자 함

1		관련근거

○ 사회기반시설에 대한 민간투자법 제15조, 시행령 제16조(실시계획의 승인)

○ 실시협약 제18조(실시계획의 승인)

2		사업개요

○ 구    간 : 샛강역~대방역~보라매역~신림역~서울대앞

○ 규    모 : 연장 7.76km, 정거장 11개소, 차량기지 1개소

○ 공사기간 : '17.02.03. ~ '22.02.02. (60개월)

○ 총사업비 : 5,606억원(2007.7.1. 불변가, 보상비 별도)

○ 사업시행자 : 남서울경전철㈜

3		추진경위

○ '15.08.12 : 실시협약 체결

○ '16.09.08 : 실시계획 승인 고시(서울시고시 제2016-273호)

- 토목부분(토공·가시설) 승인

○ '17.01.26 : 실시계획 변경(1차) 승인 고시(서울시고시 제2017-25호)

- 전체 부분 승인

○ '17.11.22 : 실시계획 변경(2차) 승인 고시(서울시고시 제2017-423호)

- 지적분할측량 성과를 반영한 면적 정정

○ '18.09.10 : 실시계획 변경(3차) 승인 신청(남서울→본부)

○ '18.09.13 : 실시계획 변경 승인을 위한 유관기관 협의

○ '18.10.17 : 유관기관 협의의견 조치계획 제출(남서울→본부)

- 협의의견 2건 반영 완료

○ '18.11.15 : 총사업비 변경 관련 공사비, 설계비 및 부대비 변경

○ '18.11.20 : 실시계획 변경(3차) 승인 신청서 보완 제출(남서울→본부)

4		실시계획 변경(3차) 주요내용

○ 공사기간 및 총사업비 : 변경없음

○ 사업구간 변경 현황

연번	변경사항	변 경 내 용
*	******	******************************************** **************************************
*	******	*************************************
*	******	*************************************
*	******	*******************************
*	******	*******************************
*	******	****************************************
*	***	********************************************************************** **********************************
*	****	********************************* ***************************************
*	***	****************************************************************************
**	******	*******************************************
**	***	******************************

********************************

**************************************************

○ 용지변경 현황

구 분	당 초	변 경	증·감
수 용	4,212.3㎡	4,349.8㎡	증 137.5㎡
지하사용	110,934.4㎡	112,145.1㎡	증 1,210.7㎡
일시사용	16,435.9㎡	17,587.2㎡	증 1,151.3㎡
합 계	131,582.6㎡	134,082.1㎡	증 2,499.5㎡

************************************************

5		조치계획

○ 남서울경전철㈜에서 '18.11.20. 보완 제출한 실시계획 변경(3차) 승인신청서를 검토한 바, 설계변경 사항 및 도시계획시설 변경결정 등이 적정한 것으로 판단되므로 실시계획 변경(3차) 승인코자 함.

6		향후계획

○ '18.11.30 : 실시계획 변경(3차) 승인고시 의뢰

○ '18.12.06 : 실시계획 변경(3차) 승인고시

붙임 : 1. 실시계획 변경(3차) 승인 요약서 1부.

2. 실시계획 변경(3차) 승인서(안) 1부.  끝.