문서번호	설비부-16377
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		代마동훈	11/29 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

소위원회 조치결과 및 설계변경(총차2회, 1차1회) 검토보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 전기공사』

소위원회 조치결과 및 설계변경(총차2회, 1차1회) 검토보고

『남산예장자락 재생사업 전기공사』책임건설사업 관리단으로부터 제출된 설계변경 소위원회 자문의견 조치결과 및 설계변경(총차2회, 1차1회)에 대하여 검토보고 함.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 남산예장자락 재생 전기공사

□ 규     모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

□ 공사기간 : `17.08.01~`19.12.31

□ 공 사 비 : *************************************

□ 시 공 사: 한전산업개발(주) 외 1개사

□ 감 리 사: ㈜동성엔지니어링

□ 공 정 률 : 13%(소방재난본부 리모델링 옥외등 공종 진행)

2		관 련 근 거

□ 남산예장감리 제2018-407호(`18.11.28)

- 남산예장자락 재생사업 전기공사 설계변경 검토보고

3		소위원회 심의결과 반영

□ 설계변경 소위원회 개요

□ 일 시 : `18.11.26(월) 10시~

□ 자문위원 : 건축설비과장, 간사 백남진 외 4명

□ 자문결과 : 조건부 가결(자문위원 심의결과 반영)

□ 주요 심의의견 및 조치사항

연번	심의의견	조치결과
1	·HFIX전선 동시배열 품 적용(0.009인)	·심의 의견대로 0.009인 적용
2	·유도등 설치 품 서울형 품셈 적용	·서울형 품셈(0.1인) 반영
3	·가로등 주내배선은 등기구업체에서 제공하 므로 물량 제외	·물량 제외함
4	·분전반/조명기구 상세도 및 전기계산서 제출	·관련도면 및 계산서 제출함
5	·증감분에 대한 제비율은 설계변경 당시의 관계법령에서 정한율을 초과하지 않을 것	·간접노무비 8.5%→7.7% 정정

□ 심의결과 반영금액

당초 계약금액	심의요청 금액	심의결과 반영금액	심의요청대비 증감액
***************	***************	***************	************

4		설계변경 내용 검토

□ 변경사유 : 당초 본 사업의 범위에 소방재난본부 리모델링이 없었으나, 주공종에서 리모델링 진행하여 전기공사(소방포함) 내용 추가

□ 공사범위 : 지하1,2층 리모델링 및 옥외 주차장 재구획에 따른 전기설비 시공

□ 공종별 변경내용

공 종		추가공사 내용	변경금액 (직접비)
전기	전력간선공사	·분전반 3면 외 전력간선 공사	**********
	전열공사	·지하1층, 지하2층 콘센트류 53개 설치 (배관,배선 포함)	**********
	전등공사	·지하1층, 지하2층 각종 등기구 189개 설치(배관,배선,레이스웨이 포함)	**********
	옥외보안등공사	·옥외등주 5본 설치(배관,배선 포함)	*********
전기소방	자탐설비공사	·화재감지기 89개 설치(배관,배선 포함) ·시각경보기 3개 설치 ·화재수신기 교체 및 소방펌프류 밸브 회로 신설	**********
	유도등공사	·유도등 48개 설치(배관, 배선포함)	**********
	비상조명등	·비상조명등 13개 설치(배관, 배선포함)	*********
<직접비 소계>			***********
<간접비 및 VAT>			**********
<계약금액>			***********

□ 총차 변경내용(소방재난본부 리모델링 추가)

□ 단가산정 기준

구분	반영내용	관련근거
감소물량	없음	공사계약일반조건 제7절 제1호 나항(계약상대자의 책임없는 사유)
증가물량	신규단가에 낙찰률(86.745%) 적용
신규비목	〃

□ 1차(금차) 변경내용

- 변경사유 : 연내 원활한 예산지출을 위해 1차와 장래차간 내역변경

· 본공사(남산예장자락)는 선행공정(건축) 미시공으로 1차공사에서 제외하고,     소방재난본부 리모델링 시공 물량 반영

□ 계약금액 변경 내용

차수	당 초	변 경	증감액
1차	*************	*************	*************
총차	***************	***************	**************

5		보고자 의견

□ 건설사업관리단이 제출한 설계변경 소위원회 심의의견 조치결과와 설계변경(총차,1차) 내역이 적절히 반영되었으므로 총무부로 계약변경 의뢰하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서(총차,1차) 각 1부. 끝.