문서번호	건축부-17133
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축관리과장	건축부장
남광연		차무흥	11/29 임인구
협조

관급자재(단열재일체형 덱플레이트) 구매계획 보고

[스페이스 살림 조성공사]

2018. 11.

도시기반시설본부

(건 축 부)

관급자재(단열재일체형 덱플레이트) 구매계획 보고

[스페이스 살림 조성공사]

「스페이스 살림 조성공사」에서 필요한 단열재일체형 덱플레이트를 구매하고자 공고하였으나 단독응찰로 2회 유찰되어 관련규정에 따라 수의계약으로 변경하여 긴급 구매코자 검토 보고드림.

1		공사개요

○ 공 사 명 : 스페이스 살림 조성공사

○ 위    치 : 서울시 동작구 대방동 340-3외 3필지

○ 공사규모 : 지하2/지상 7층, 연면적 17,621㎡

○ 총공사비(건축·토목·조경) : ***********************************

○ 공사기간 : 2017. 12. 26 ~ 2020. 6. 25(2차 공사 : 2019. 5. 31까지)

○ 시 공 자 : ㈜호반건설 외2

○ 건설사업관리 : ㈜희림종합건축사사무소 외1

2		추진경위

○ ‘17. 12. 26 : 공사 착수

○ ‘18. 10. 29 : 관급자재(단열재 일체형덱플레이트) 구매 계약심사의뢰(건축부→계약심사과)

○ ‘18. 11. 02 : 계약심사 결과 통보(계약심사과→건축부)

○ ‘18. 11. 14 : 관급자재(단열재 일체형덱플레이트) 구매 계약의뢰(건축부→재무과)

○ ‘18. 11. 15 : 1차 공고(11.21. 단독응찰)

○ ‘18. 11. 21 : 2차 공고(11.27. 단독응찰)

○ ‘18. 11. 27 : 입찰결과(재공고 유찰)통보(2회유찰, 재무과→건축부)

3		구매대상 및 방법 검토

□ 구매대상 물품현황

❍ 구매 물품 현황

품 명	규 격	단 위	수 량	금액
단열재일체형 덱플레이트	PF보드, 강판 탈형, 현장 차상도 ※세부규격: 내역서 참조	M2	*****	************

❍ 납품조건

- 단열재: PF보드 / 덱플레이트: 강판, 탈형덱플레이트

- 설계도면, 시방서, 구조계산서 및 시공지침 조건에 의거 납품

❍ 납품기간 : 계약체결일 ～ 2019. 11. 30.

❍ 현장위치 : 동작구 대방동 340-3외(대방역)

❍ 인도조건 : 현장 차상도

❍ 소요예산 : *****************

- 예산과목 : 여성가족정책실 여성정책담당관, 양성평등 및 여성복지증진, 여성경제력 강화, 스페이스 살림 건립 추진,시설비 및 부대비, 시설비

□ 물품 구매 계획

❍ 발주시기 : 2018년 11월

❍ 기초금액 : *********

❍ 입찰방법 : 수의계약(1인견적)

- 지방계약법 제26조(재공고입찰과 수의계약) ① 지방자체단체의 장 또는 계약담당자는 제19조제2항에 따라 재공고입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 수의계약에 의할 수 있다.

○ 수의계약 업체 현황

업체명	대표자	사업자등록번호	주소	비고
㈜덕신하우징	김용회	136-81-09463	충남 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34

○ 수의계약업체 선정사유

- G2B분류번호(10자리, 3019189601)를 제조물품으로 입찰참가 등록

- 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자로서, 직접생산확인서(물품분류번호 3019189601, 덱플레이트)를 소지한 업체이고 본부공사에 납품실적이 있는 업체로 선정

4		향후 추진계획

❍ ‘18.11. : 수의계약체결(긴급구매)

❍ ‘18.12. ~ ’19.11. : 물품납품 및 포장완료

붙임 1. 수의계약 요청 사유서 1부.

2. 산출기초 조사서 1부.

3. 입찰결과통보(2회 유찰, 재무과) 공문 1부.

4. 사업자등록증 및 업체관련 서류 각1부.  끝.