문서번호	클라우드센터운영과-2339
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		클라우드센터운영과장	데이터센터소장
최성욱		박복수	11/29 김현규
협조
	인터넷통신과장		황기원

TOPIS시스템 이전 비상 근무계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

클라우드센터운영과

TOPIS시스템 이전 비상 근무계획

클라우드센터 인프라 구축(3단계) 사업 관련하여 TOPIS시스템 이전이 일과 후 주말에 실시됨에 따라 비상 근무계획을 수립하여 이전사업에 만전을 기하고자 함

□ 이전개요

○ 이전일시 : 2018.11.30.(금) 19:00 ~ 12.2.(일) 24:00

○ 장    소 : 종로 교통정보과 → 상암 클라우드센터

***************************

******************************

○ 참여인력 : 약 100명

□ 근무계획

○ 조편성

	11.30(금) 19:00 ~ 12.01(토) 08:00	12.01(토) 08:00 ~ 12.01(토) 19:00	12.01(토) 19:00 ~ 12.02(일) 08:00	12.02(일) 08:00 ~ 12.02(일) 24:00
주요작업	(종로) 시스템 포장/ 상차/ 운송 (상암) 하차	(상암) 반입/ 설치/ 서비스 점검	(상암) 설치/ 서비스 점검	(상암) 서비스 점검
근무자	최성욱, 윤동식	박복수, 신소정, 지창원 박종순, 노형곤	최성욱, 윤동식 박종순, 노형곤,	박복수, 신소정, 지창원
비고	- 이전 후 서비스 점검시 서초에서 방화벽 등으로 문제발생시 조속한 해결을 위해 인터넷통신과 통신, 보안 담당자는 유선 대기 클라우드센터 운영사업자 중 통신, 보안담당자 비상근무 실시

※ 교통정보과/주차계획과/상황대응과는 자체적으로 비상근무 실시

○ 장소 및 역할

- 클라우드센터 밖 도로 : 운송차량(2회) 하차, 운반 감독

- 클라우드센터(17층~19층) : 시스템 설치, 기동, 서비스 점검, 참여인력 감독 등

□ 행정사항

*****************

***********************************************************

***********************

*****************************************************

붙임 1. TOPIS시스템 이전 시나리오(시트1,2) 1부.

2. TOPIS시스템 이전 비상연락망 1부.

3. 중간보고회(11월21일) 발표자료 1부.