문서번호	설비부-16438
결재일자	2018.11.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	11/29 권오식
협조

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계공사』

공사 및 관급자재 납기 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 11.

도시기반시설본부

(설 비 부)

[탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계공사]

공사 및 관급자재 납기 연기 검토 보고

「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업」의 기계공사 및 소요 관급자재 납품기한 연장요청 건에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		관련근거

□ 기계설비공사 1차분 준공기한 및 지급자재 납품기한 연장 요청

- 탄천하감 2018-374호(2018.11.28.)

2		공사개요

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□ 공사규모 : 총인처리시설 Q=450,000㎥/일

□ 공사기간 : 2017. 12. 4 〜 2020. 2. 3(1차 ‘17.12.4 ∼ ’19.2.3)

□ 공 사 비 : 11,715백만원(도급비 1,837, 관급비 9,878)

□ 시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사사무소외 3개사

3		검토내용

□ 계약 현황

구분		계약번호 [구매관리번호]	계약자	계약금액	조달수수료	준공기한 (납품기한)	비고
기계 공사	총차	2017110FE1A-00	㈜이수 에이치앤씨	1,837,280,000원	-	2020.02.03
	1차			900,000,000원	-	2018.12.31
수문		00168308816 [121821920000]	㈜신정기공	247,715,100원	1,270,770원	(2018.12.31.)
PAC 공급펌프		12182126100 [12182133400]	천세산업(주)	164,010,000원	1,478,650원	(2018.12.31.)
폴리머 공급펌프		2018090218900	㈜하나엔텍	28,077,700원	-	(2018.12.31.)
슬러지 이송펌프		2018080BCFE00	(유)건영산업	43,881,910원	-	(2018.12.31.)
수중펌프		2018070417000	한국펌프공업 협동조합	21,900,000원	-	(2018.12.31.)
일축 나사식펌프		2018080037600	(유)대성기계	23,675,300원	-	(2018.12.31.)
송풍기		2018080BBC200	유환엔지니어링(주)	26,144,140원	-	(2018.12.31.)

□ 변경 내용

구 분		계약금액		납품기한		비고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
공사	총차	1,837,280,000원	변경 내용 없음	2018.12.31	변경내용 없음
	1차	900,000,000원		2018.12.31	2019.08.31
수문		247,715,100원		2018.12.31	2019.08.31
PAC 공급펌프		164,010,000원		2018.12.31	2019.08.31
폴리머 공급펌프		28,077,700원		2018.12.31	2019.08.31
슬러지 이송펌프		43,881,910원		2018.12.31	2019.08.31
수중펌프		21,900,000원		2018.12.31	2019.08.31
일축 나사식펌프		23,675,300원		2018.12.31	2019.08.31
송풍기		26,144,140원		2018.12.31	2019.08.31

□ 납품기한 연장 사유 : 선행공정(토목공사 지연)

□ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

4		건설사업관리기술자 검토 의견

□ 「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사」 시행 중 선행공종인        토목공사의 지연으로 기계설비분야 1차분 준공기한 및 지급자재 납품        기한 연기는 적정한 것으로 판단됨.

5		조치계획

□ 선행공정(토목) 지연에 따라 준공 및 납품(설치)시기가 미도래하고

□ 건설사업관리기술자 보고 내용이 적정하다고 판단되어 현장여건에 맞게 기계공사(1차)와 관급자재 납품기한을 연장하고자 함

따로 붙임 : 관급자재 납품기한 연장 관련 문서  1부.  끝.