투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	경기도지사(철도건설과장)
(경유)
제목	하남선(5호선 연장) 궤도공사 추진에 따른 토목구조물 인계인수 협조 요청

1. 도시철도토목부-11646(2017.9.6.)호와 관련입니다

2. 하남선(5호선 연장) 궤도공사(1공구/토목1∼3공구) 관련, 2019년 상반기 하남선 1단계 구간 개통을 위해 통합공정회의(2017.9.12.)에서 요청한 바 있는 토목구조물 인계·인수 (토목2~3공구)를 궤도공사 공정계획에 차질이 없도록 아래의 요청일에 인계토록 적극 협조  하여 주시기 바랍니다

○ 토목2공구

공 구	토목 구조물(노반)		자재 투입구
내 용	노반 500m이상 연속 인계요청 2k311~2k661,1K559~1k798 (총연장= 589m)	노반500m이상 인계요청 1k099~1k381,1K412~1k558, 1K799~2K310(총연장=939m)	1k805 (임시 투입구)	2k308
인 계 요청일	2017.12.31	2018.03.01	2017.11.30	2018.2.15

○ 토목3공구

공 구	토목구조물(노반)	자재 투입구		비 고
내 용	2k661~H3(4k160)미비 사항 조치요청 (물청소 등)	3k421 레미콘 투입구	H3 정거장 4k300(레일투입구)	2k922, 3k451, 3k918, 4k394자재투입구 인계 요청
인 계 요청일	당초: 2017.10.20.(인계 지연) 변경: 2017.11.01.	2018.02.15	2017.11.24

붙임 : 사진 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김근수		궤도과장	최진규		도시철도토목부장	11/01 김진팔
협조자
시행	도시철도토목부-14098	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청게천로 8(무교동 96번지) 플리미어플레이스 빌딩 9층	/
전화	02-772-7242	/전송	02-772-7306	/	kksu49@seoul.go.kr	/	부분공개(5)