문서번호	교량안전과-21121
결재일자	2017.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		교량관리팀장		교량안전과장
송준섭		유제천		11/21 한유석
협 조

『영동6교, 탄천1교』집중점검 결과 보고

(하반기 조단위 집중점검)

2017. 11.

교량안전과

(교량관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

영동6, 탄천1교 집중점검 결과 보고

(하반기 조단위 집중점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2017년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 영동6, 탄천1교 집중점검 결과를 보고 드림

시설물 현황

○ 제원 및 현황

연번	시설물명		규격(m)		구 조 형 식	설 계 하 중	준 공 연 도	비고
			폭원	연장
1	영동6교	본교	50	120	PSC	DB-24	1985
		진입교	38	200	STB	DB-24	1985
2	탄천1교	본교	29	589	STB	DB-24	‘90.12.
		D램프	8.1	37	STB	DB-24	‘90.12.
		E램프	7.5	67	STB	DB-24	‘90.12.

○ 위치도 및 전경사진

영 동 6 교
	위 치 도	전 경 사 진
탄 천 1 교
	위 치 도	전 경 사 진

점검개요

○ 점검일시 및 점검구간 : 2017. 11. 8.(수) 11:00~17:00

영동6교, 탄천1교 전구간

○ 점 검 자 : 9명

- 영동6교 주치의 : 한국종합기술 원종진(탄천1교 점검 병행)

- 탄천1교 주치의 : 대신이엔지 하상우(개인사정으로 불참)

- 교량안전과 : 시설물담당자 외 7명(교량관리팀, 특수교량팀, 강구조교량팀)

○ 점검사진

점검결과 및 조치계획 : 세부내역 별첨

○ 영동6교 점검결과(지적사항 19건)

- 신축이음부 : 누수의 원인중 보도부 방수 시공후에도 지속적인 누수가 관찰되어 ‘18년 정밀점검시 신축이음부 후타재 균열부를 재조사하여 직접적인 누수 원인 규명 후 조치 예정

- 연석부 : 본교측 연석부의 경우 누수가 차단된 것으로 판단되며, 접속교  연석부의 경우 신구 콘크리트 이음부 종방향균열이 발생하여 하자보수 작업 지시(균열주입보수 시험시공 후 전개소 보수 실시)

- 받침부 플레이트 부식 및 교량받침 부식은 영동6교 내진보강공사에 포함하여 정비 실시

- 강박스 가로보 하면 도장박리 및 강박스 복부 도장박리는 ‘18년 정밀점검용역 시 부착강도 시험 후 정비 예정

- 그 외 하부플랜지 녹 발생, 표면처리재 박리 등은 ‘18년 일상유지보수공사에 작업 지시하여 정비 예정

○ 탄천1교 점검결과(지적사항 16건)

- A1 신축이음부 체수 발생, 배수구 주변 연석 손상, 방음벽지주 보강재 볼트체결 미흡 등은 ‘17년 보수공사에 지시하여 조치 완료 및 작업 예정

- 보도부 신축이음부 철판덮개 들뜸 및 단차로 인하여 보도를 이용하는 시민 민원 제기 및 램프와 본교 접속부 2개소에 종방향 신축장치가 없어 균열이 발생되어 ‘17년 탄천1교 보수공사에 추가 작업지시하여 정비 요청

- 보도부 포장 균열 발생, 바닥판 콘크리트 탈락, 표면보수재 박리 등은 ‘18년 탄천1교 보수공사에 포함하여 정비 예정

- 배전판 차도측 노출은 ‘17년 탄천1교 보수공사에서 작업중으로 11월 18일까지 작업 완료 예정이며, 차량방호울타리 볼트체결 미흡은 관급자재 설치업체에 작업지시하여 전개소 작업 완료

행정사항

○ 외부전문가 현장점검 수당(25만원) 지급(2시간 초과로 5만원 추가지급)

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

붙임 : 1. 점검결과 및 조치계획 각 1부.

2. 외부전문가 의견서 1부.   끝.