문서번호	교통운영과-13047
결재일자	2018.8.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
류근호		전태호	08/03 강진동
협조

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 배정 검토 보고

2018. 8.

도시교통본부

(교통운영과)

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 배정 검토 보고

중앙버스전용차로 흐름개선사업 관련 설계변경 등에 따른 사업부서 예산 감배정 및 재배정 요청에 대한 검토보고 임.

□ 추진근거

○ 신설동역오거리 흐름개선사업 예산 감배정 요청(북부도로사업소 도로보수과-4578, ‘18.5.31)

○ 등촌삼거리 흐름개선사업 예산 재배정 요청(강서구 공원녹지과-13040, ‘18.7.25)

□ 주요 변경사항

○ 신설동역오거리: 노면표시 예산 감배정 요청(감79,000천원)

- 본 사업 구간은 노후포장도로 정비공사 구간으로 도로사업소 노후포장도로 정비공사 시 노면표시 공사를 포함 시행계획으로 예산 감배정 요청

○ 등촌삼거리: 수목식재 방법 변경(이식 ⇒ 신규 식재, 증90,000천원)

- 등촌삼거리 장송은 2008년 식재 이후 활착된(B70cm이상) 대규모 수목으로 가식과 정식을 위해 2회 이식 시 고사할 확률이 매우 높아 신규식재로 변경

※ 기존 수목은 강서구 지정장소로 이식(정식)

□ 예산 조정 내역

사업명	당 초 (기배정액)	변 경 (총사업비)	증 감	비 고
신설동역오거리 (북부도로사업소 도로보수과)	79,000천원	-	감 79,000천원	노면 표시
등촌삼거리 (강서구 공원녹지과)	173,767천원	263,767천원	증 90,000천원	조경 공사

※ 예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 조치 계획

○ 설계변경 요구된 사업 내용과 같이 예산 감배정 및 추가 재배정하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임: 등촌삼거리 중앙버스전용차로 흐름개선사업(조경공사) 설계내역서. 1부.  끝.