문서번호	교통운영과-15702
결재일자	2018.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		BRT팀장	교통운영과장
류근호		전태호	09/18 강진동
협조

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 재배정 검토 보고

2018. 9.

도시교통본부

(교통운영과)

중앙버스전용차로 흐름개선사업 예산 재배정 검토 보고

중앙버스전용차로 흐름개선사업(강서구청사거리, 이대역)과 관련하여 사업부서 예산 재배정 요청에 따른 검토 보고드림.

□ 추진근거

○ 강서구청사거리 흐름개선사업 예산 요청(강서구 도로과-13000, ‘18.8.23)

○ 이대역 흐름개선사업 예산 요청(서대문 교통행정과-60398, ‘18.9.10.)

□ 예산 요청 내용

【강서구청사거리: 60,000천원】

○ 강서구청사거리 교통개선사업 잔여구간 차도조성 추가 요청(강서구청 도로과)

- 강서구청사거리 교통개선사업(220m)구간 중 일부구간(L=30m) 미시행에 따른 민원 발생 해소 및 교통개선을 위한 추가사업 요청

‣도로 및 보도포장, 경계석 및 측구설치, 차선도색 등 : 35,000천원

‣신호등, 가로등, 교통맨홀 등 이설비 : 25,000천원

【이대역: 7,005천원】

○ 이대역 중앙버스정유소 시설개선 관련 현장연건 반영에 따른 추가 예산소요

- 공사현장 도로 지세별 할증(20%), 상가영업 피해 최소화 위해 야간작업 할증(25%), 보도블럭 1일 작업량 소규모 할증(50%) 등

□ 예산 재배정 요청 금액

사업명	당 초 (기배정액)	변 경 (총사업비)	증 감	비 고
중앙버스전용차로 흐름개선사업 (강서구청사거리)	-	60,000천원	증 60,000천원	강서구 도로과
중앙버스전용차로 흐름개선사업 (이대역)	13,485천원	20,490천원	증 7,005천원	서대문구 교통행정과

※ 예산과목(교통사업특별회계)

- 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스 이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 조치 계획

○ 강서구청사거리 및 이대역 흐름개선사업에서 요구된 내용과 같이 예산을 추가 재배정하여 사업 시행에 만전을 기하고자 함.

붙임: 1. 강서구청사거리 흐름개선사업 예산 요청. 부.

2. 이대역 흐름개선사업 예산 요청. 1부.  끝.