문서번호	시설과-2451
결재일자	2018.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
황은애	송복식	진병규	10/02 안수연
협 조
	공원운영과장		代김남현

「보라매공원 동문부근 쉼터 및 시설물 정비공사」

실정사항(1차) 검토 보고

2018. 10.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

「보라매공원 동문 부근 쉼터 및 시설물 정비공사」

실정사항(1차) 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「보라매공원 동문부근 쉼터 및 시설물 정비공사」와 관련하여 현장 실정 사항이 있어 아래와 같이 검토 보고 드림

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 보라매공원 동문부근 쉼터 및 시설물 정비공사

○ 공사기간 : 2018. 8. 6 ~ 10. 19

○ 총공사비 : 금241,245,880원(금이억사천일백이십사만오천팔백팔십원)

(도급액 : 금185,437,130원/ 관급자재 : 금55,808,750원)

○ 도 급 자 : 반석에코텍㈜ 대표 김기신

○ 공사내용 : 목재계단 정비 및 쉼터 조성 등

□ 실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 원)

공종	현황 및 문제점	검토 내용	비고
도급	▶ 배드민턴장 이용자들이 기존 방풍벽 위치 변경 및 추가 설치를 요구함에 따라 공종 추가(민원사항)	▷ 방풍벽 이설 ·방풍벽 이설(W1500×H3000) 0경간 → 7경간 ·보조지주대이설(H형 지주대) 0EA → 3EA ▷ 방풍벽 설치 ·방풍벽 설치(W1500×H3000) 0경간 → 6.3경간 ·보조지주대이설(H형 지주대) 0EA → 3EA	증 7,284,952
	▶ 와우산 목재계단 도면과 현장이 상이하여 현장 여건에 맞추어 침목계단 물량 추가	▷ 목재계단 설치 ·목재계단B(480×150×2500)126단 →151단	증 12,292,675
	▶ 북동산 둘레길 이용자의 편의 증진을 위하여 먼지털이기 설치(민원사항)	▷ 먼지털이기 설치 · 먼지털이기(1200×830×1300) 0EA→2EA	증 9,827,888

□ 소요예산 내역(개략금액)

(단위 : 원)

구 분	소 요 금 액				비고
	당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비	241,245,880	282,709,700	증	43,514,840
도 급 공 사 비	185,437,130	228,951,970	증	43,514,840
관 급 자 재 비	55,808,750	53,757,730	-	-

□ 예산검토

○ 예산집행 내역

(단위 : 원)

구 분	예산액 (a)	설계용역 (b)	공사비 (c)	관급자재 (d)	잔액 [a-(b+c+d)]	비고
	300,000,000	15,200,000	185,437,130	55,808,750	43,554,120

‣ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

□ 검토의견

○ 상기 각 항목별 실정보고 사항에 대하여 공사 시행하고 추후 설계변경 시행

붙  임 : 변경개략내역서 1부.  끝.