투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(변경계약체결통보-남산예장자락 재생 기계설비공사)

1.업무지시현장 : 남산예장자락 재생 기계설비공사[장기-1차] (주) 지정이앤씨, 남산예

장자락 재생 기계설비공사[장기-1차] 주식회사 동성엔지니어링, 남산

예장자락 재생 기계설비공사[장기-1차] (주)삼아 에코빌

2.작 성 일 자 : 2018-11-29 08:11:53

3.지 시 내 용

가. 남산예장 감리 제2018-392호(2018.111.23.)호와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 「남산예장자락 재생 기계설비공사」 설계변경(총차 1회, 1차 1회) 및 공사기간 연장 요청건에 대하여 붙임과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려드리니 공사관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

붙임  변경계약서 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							박도원			녹색성장과장					11/29 代마동훈
협조자
시행			설비부-16374									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8637						/전송			02-3708-8659					/													/	부분공개(7)