문서번호	기전설비과-9243
결재일자	2018.11.30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
이상록		代김영준	11/30 유성종
협조

영등포 탈수설비 개량 배관공사

설계변경 심의 위원회 개최 및 결과보고

2018. 11.

상수도사업본부

【 생산부】

- 영등포정수센터 탈수설비 개량사업 -

설계변경 심의 위원회 개최 및 결과보고

우리 부에서 시행중인‘영등포정수센터 탈수기 개량 배관공사’에 대한 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업 현황

◯ 사 업 명 : 영등포정수센터 탈수기 개량 배관공사

◯ 공사기간 : 2018.07.02. ~ 2018.12.20.

◯ 총사업비 : 231,464,300원

◯ 주요내용 : 슬러지,약품,세정수 펌프 및 배관교체 등

◯ 계약업체 : 영풍진흥기업(주)

Ⅱ		위원회 개최

◯ 일    시 : 2018.11.27.(화)

◯ 장    소 : 생산부 회의실

◯ 안    건 : 신규 공종 물량 적정 여부

◯ 검토위원 : 기전설비과장, 김형집, 김영준, 곽대근, 박종석

◯ 설계변경사유 : 신규물량 발생(탈리여액배관 추가)

∙ 250A STS304 배관 29m, 200A STS304 18m 추가

∙ 250A 게이트밸브 2대, 200A 버터플라이밸브 4대 추가

◯ 도급비 변경 : 증)22,492,360원

∙ 당 초 : 231,464,300원

∙ 변 경 : 253,956,660원

Ⅲ		심의 결과

□ 신규물량 증가에 따른 설계변경 및 재경비 내역 적정함.

Ⅳ		행정 사항

◯ 계약상대자(영풍진흥기업)와 변경내역 합의 후,

◯ 우리 본부 재무회계과 계약 변경 요청

붙임  1.설계변경 검토의뢰서 1부.

2.변경내역서          1부.

3.변경도면            1부.

4.설계변경 검토의견서 1부.  끝.