투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(보라매공원 테마 물놀이터 조성공사)

1. 시설과-3065(2018.11.30.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 『보라매공원 테마 물놀이터 조성공사』와 관련하여 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 보라매공원 테마 물놀이터 조성공사

나. 도 급 액 : 금260,933,900원(금이억육천구십삼만삼천구백원)

다. 공사기간 : 2018. 09. 10. ~ 2018. 12. 08.

라. 도 급 사 : 나원이엔지(주) 대표 장경규

마. 준공기한 연기

- 당 초 : 2018. 09. 10. ~ 2018. 12. 08.

- 변 경 : 2018. 09. 10. ~ 2018. 12. 22.

바. 연기사유 : 현장 실정사항에 따른 절대공기 부족

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

붙   임 : 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기 검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	여은솔		시설관리팀장	김영균		시설과장	11/30 진병규
협조자
시행	시설과-3066	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 시설과 (신대방동)	/
전화	02-2181-1159	/전송	02-2181-1169	/		/	부분공개(5)