투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 의뢰[탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사]

1. 설비부-16505(2018.11.30.)호와 관련입니다.

2. 우리 부에서 시행중인 “탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사”에 필요한 관급      자재에 대해 다음과 같이 납품기한 연기를 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 내용

계약번호	계약자	품 명	단위	수량	계약금액 [원]	납품기한		비 고
						변경전	변경후
12182079900	****************	배전반	식	1	***********	‘18.12.31	‘20.5.31	계약금액 변경없음
12182079800	******* ****	배전반	식	1	***********
12182129500	*******	프로세스 제어반	식	1	***********
12182100100	*********	계장제어 장치	식	1	***********
00177050101	******	영상감시 장치	식	34	**********
00178217400	******	영상감시 장치	식	22	*********

나. 납품기한 연기사유: 선행공사 지연에 따른 관급자재 납품 연기

다. 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

라. 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 납품기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의각서 6부.  끝.

	설비부장
주무관	전성완		환경설비과장	여인웅		설비부장	11/30 권오식
협조자
시행	설비부-16527	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15F	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8618	/전송	02)3708-8659	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(5)