문서번호	방재시설부-15328
결재일자	2018.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		진재섭	11/30 이임섭
협 조

「신상도 지하차도 확장공사(6차)」

발주계획 검토 보고

2018.11.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사(6차)」

발주계획 검토 보고

「신상도지하차도 확장공사」6차 발주 계획에 대해 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

❍ 위    치 : 동작구 상도동 159-21~207-5(상도동길~양녕로)

❍ 규    모 : 도로 확장 2차로 → 4～6차로, 연장 324m

(지하차도 확장 2차로 → 4차로, 연장 230m)

❍ 공사기간 : 총차 ‘07.12.31.~‘18.12.31.

❍ 도 급 비 : 총차 11,964,876천원

❍ 도 급 사 : (유)한백종합건설 외 1개사 (대표 : 이진일)

❍ 사업관리 : ‘19년 상반기 발주 예정

Ⅱ		2018년 예산 현황

(단위 : 천원)

구 분	‘18년 예산현액	‘18년 본예산	‘17년 사고이월	비 고
합 계	8,959,000	5,000,000	3,959,000
시 설 비	8,709,000	4,750,000	3,959,000
감 리 비	250,000	250,000

❍ 예산과목 : 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비

Ⅲ		6차 발주 계획

❍ 공사기간 : ‘18.12.15.~‘18.12.31.

❍ 발주금액 : 2,550,000천원

(단위 : 천원)

구 분	총 차	1차	2차	3차	4차	5차	6차	장래분
계약금액	11,964,000	980,000	1,500,000	360,000	44,935	267,354	2,550,000	6,261,711
공사기간	‘07.12.31. ~ ‘18.12.31.	‘07.12.31. ~ ‘08.12.30.	‘08.12.22. ~ ‘09.12.31.	‘10.4.23. ~ ‘10.12.31.	‘10.12.30. ‘15.2.28.	‘16.5.19. ~ ‘16.12.31.	‘18.12.15. ~ ‘18.12.31.

❍ 세부내역

(단위 : 천원)

구 분		공종 및 수량	금 액	비 고
토목공사	토공	기존 건물 철거 : 5,324㎥ 사토 운반 : 13,000㎥	647,066
	배수공	맨홀(1호) : 10조 관로공(D250~600mm) : 358m	27,194
	옹벽공	옹벽공(H3.0~6.5) : 70m 배수관(P.V.C. Φ100mm) : 10m 철근가공조립 : 17,839ton	27,029
	가시설공	지하차도 H-PILE 말뚝박기 : 180본 옹벽 H-PILE 말뚝박기 : 70본	745,443
	지반보강공	지반보강(SGR) : 230㎥	84,446
	포장공	아스파르 포장, 기층 : 10a	15,817
	부대공	가설건물 및 세륜세차시설 각 1개소 설치 가설건물부지 임대 : 200㎡ 교통정리원 : 450인 자재운반 : 철근 150ton, 시멘트 1,020대	125,700
	사급자재대	레미콘 1,482㎥, 철근 227ton, 아스콘 505ton	301,851
조경공사		수목이식(H4.1~4.5) : 33주	7,889
직접공사비			1,982,435
간접공사비			567,565
도 급 비			2,550,000

Ⅳ		검토 의견

❍ 도급사에서 제출한 6차 공사 산출내역서 검토 결과, 금년 예산중 시설비 2,550백만원 내에서 공사 추진하여 ‘19년 12월 준공하는 공정이 적정하다고 판단되며,

❍ 총차 준공기한(‘18.12.31.)이 도래함에 따라 우선 6차 공사를 계약한 후 총차 및 6차 공사 모두 준공기한 연기하여 장기계속계약을 유지하여야 함

Ⅴ		조치 계획

❍ 상기 검토의견과 같이 계약부서(총무부)에 차수 계약 의뢰하고, 금년 12월중 6차 및 총차 준공기한 연기 조치하여 공사가 차질 없이 진행되도록 만전을 기하고자 함

붙임 : 1. 산출내역서 1부.

2. 준공기한 연기 검토보고 1부.  끝.