문서번호	설비부-16505
결재일자	2018.11.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
전성완	여인웅	전결 11/30 권오식
협 조

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

관급자재 납품 연기 검토 보고

2018. 11.

도시기반시설본부

(설    비    부)

탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

관급자재 납품 연기 검토 보고

「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사」시행중 건설사업관리단으로부터 관급자재 납품 연기 보고서가 접수되어 이에 대한 검토보고임

1		관 련 근 거

○ 전기/정보통신공사 관급자재 납품기한 연장 요청

(탄천하감2018-376호, 2018.11.29.)

2		공 사 개 요

○ 공 사 명: 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사

○ 위    치: 강남구 개포로 625번지 일원

○ 공사기간: 2017. 11. 30. ~ 2020. 3. 31.

(1차: 2017. 11. 30. ~ 2019. 2. 14.)

○ 공사내용

- 수전전력 1처리장 2,500㎾/3.3㎸, 2처리장 2,500㎾/22.9㎸

- 전기설비, 건축전기설비, 계측제어설비, 포장철거 및 복구공사,

소방설비 및 수배전반 1식

○ 도 급 비: 1,972,531천원(1차 824,400천원)

○ 공 정 률: 3%

○ 시 공 사: ㈜부경일레콤 대표 임영춘

○ 감 리 사: ㈜선진엔지니어링 대표 정종화

3		추 진 경 위

○ ‘17.11.24, 11.30 : 공사 계약 및 착공

○ ‘18. 5.17 : 변경계약

- 준공기한 연기 : ‘18.8.31 → ’19.2.14

- 계약금액 변경 : 780,000천원 → 824,000천원

○ ‘18.11.20 : 제1처리장 지장물 이설 추가 변경 실정보고 및 승인 통보

4		검 토 내 용

○ 납품기한 연기 사유

- 흙막이 가시설 공법 변경 및 지하매설물 추가이설에 따른 지연으로        구조물 공사 지연

- 선행공종 지연으로 후속공종인 전기공사 착수 불가하여 본 구조물에        설치될 전기 관급자재 납품 연기 불가피하여 시운전 완료시점인           2020.5.31.까지 납품 연기 필요

○ 납품기한 연기 내용

계약번호	계약자	품 명	단위	수량	계약금액 [원]	납품기한		비 고
						변경전	변경후
12182079900	(사)한국교통장애인협회 사업부	배전반	식	1	632,000,000	‘18.12.31	‘20.5.31	계약금액 변경없음
12182079800	한국전기신기술 협동조합	배전반	식	1	805,000,000
12182129500	제네시스이앤씨	프로세스 제어반	식	1	305,300,000

계약번호	계약자	품 명	단위	수량	계약금액 [원]	납품기한		비 고
						변경전	변경후
12182100100	탑인더스트리(주)	계장제어 장치	식	1	709,000,000	‘18.12.31	‘20.5.31	계약금액 변경없음
00177050101	이노뎁(주)	영상감시 장치	식	34	49,795,000
00178217400	이노뎁(주)	영상감시 장치	식	22	3,968,580

○ 납품기한 연기 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 자체상금 부과여부 : 미부과

건설사업관리단 검토 결과

○ 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 전기공사 시행중 선행공종인 토목       공사의 지연으로 전기분야 관급자재 납품기한 연기는 적정한 것으로       판단됨

5		조 치 의 견

○ 건설사업관리단 검토보고 내용이 적정하다고 판단되어 납품기한을           시운전 완료 시점으로 연기 조치하여 공정관리에 만전을 기하고자 함

붙임  건설사업관리단 관급자재 연기 요청 공문 1부.  끝.