투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	여의도공원관리사무소장
(경유)
제 목	변경계약 체결 통보(여의도공원 근로자 대기실 환경개선)

1. 여의도공원관리사무소-3046(2018. 11. 28.)호와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약기간 내     공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건    명 : 여의도공원 근로자 대기실 환경개선 공사

나. 계 약 자 : 우나조경건설 주식회사 대표 박선하

다. 계약금액 : 금45,000,000원(금사천오백만원)

※ 원인행위No : 1352

라. 계약기간 : 2018. 10. 4.~ 2018. 12. 2.

마. 변경내용 : 계약금액 및 준공기한 변경

구 분		공 사 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
도 급 액	공급가액	40,909,091	45,354,547	4,445,456
	부가세	4,090,909	4,535,453	444,544
	도급공사비	45,000,000	49,890,000	4,890,000

1). 준공기한 변경

- 당초 : 2018. 12. 2. → 변경 : 2018. 12. 22.

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공원운영과장
★주무관	김호영		주무관	김선희		공원운영과장	11/30 배효성
협조자
시행	공원운영과-15466	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화	300-5512	/전송	300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)