문서번호	도로보수과-10973
결재일자	2018.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
김경욱		11/30 유태용
협조

2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

제5차 작업관련 실정보고

-작업기간 변경 관련-

2018. 11.

강서도로사업소

[도로보수과]

제5차 작업관련 실정보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2018. 03. 14. ~ 2018. 12. 14.

○ 시 공 사 : 이에스피건설 대표 강 상 수

○ 도 급 비 : 금269,043,410원

□ 보고내용

○ 작업지시 개요

- 작업차수 : 5차 (11.26. 추가작업지시 시행)

- 작업기간 : 18. 11. 01. ~ 18. 11. 30.

○ 조치사항 : 작업기간 변경

○ 변경사유 : 추가작업지시에 따른 절대공기 부족

□ 변경내역

○ 작업기한 연기

당초		변경		비고
작업기간	작업일수	작업기간	작업일수
2018.11.01. ~ 2018.11.30.	30일	2018.11.01. ~ 2018.12.05.	35일	증) 5일

□ 조치계획

○ 위 변경내역을 도로 및 교통안전 부속시설물 유지보수공사(연간단가)에 변경작업지시 하고자 함.

붙 임 : 5차 작업기한 연기 요청 1부.  끝.