투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 계약 변경 의뢰(탄천물재생센터 총인처리시설 PAC공급펌프 외 5종)

우리 본부에서 시행 중인「탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사」에 소요되는 관급자재(총액)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기 내용

품 명	계약번호 (구매관리번호)	계약자	수량	계약금액 (변경없음)	납품 기한		비고
					당 초	변 경
PAC 공급펌프	12182126100 [12182133400]	천세산업(주)	1식	164,010,000원	‘18.12.31	‘19.08.31
폴리머 공급펌프	2018090218900	㈜하나엔텍	1식	28,077,700원	‘18.12.31	‘19.08.31
슬러지 이송펌프	2018080BCFE00	(유)건영산업	1식	43,881,910원	‘18.12.31	‘19.08.31
수중펌프	2018070417000	한국펌프공업 협동조합	1식	21,900,000원	‘18.12.31	‘19.08.31
일축 나사식펌프	2018080037600	(유)대성기계	1식	23,675,300원	‘18.12.31	‘19.08.31
송풍기	2018080BBC200	유환엔지니어링(주)	1식	26,144,140원	‘18.12.31	‘19.08.31

나. 연기사유 : 선행공정(토목공사) 지연으로 납품시기 조정

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙임문서 1) 납품기한 연기 검토 보고. 1부.

2) 합의각서 각 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	김도형		환경설비과장	여인웅		설비부장	11/30 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-16529	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩(15층)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02)3708-8619	/전송	02)3708-8659	/	dokebi@seoul.go.kr	/	부분공개(5)