자연의 맛 미네랄 아리수, 시민과 함께하는 북부수도!
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 계약 시행[중앙제어실 확장에 따른 실내건축공사]

1. 우리 사업소에서 시행 중인 「중앙제어실 확장에 따른 실내건축공사」건에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 계약건명 : 중앙제어실 확장에 따른 실내건축공사

나. 계약기간 : 2018.11.12. ∼ 2019.01.10.

다. 계 약 자 : 고우건업(주) 대표 현연식

라. 변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감
총공사비		21,998,000	21,138,000	감)860,000
도급비	공급가액	19,998,182	19,216,364	감)781,818
	부가가치세	1,999,818	1,921,636	감) 78,182

마. 설계변경 사유

- 신규공정 및 시공물량 증ㆍ감에 따른 계약금액 변경

- 보험료 등 제경비 정산

※ 관련근거 : 서울특별시 계약심사업무 처리규칙 및 2018년 상수도사업 계약심사 추진계획(재무회계과-915, 2018.01.22.)

바. 예산과목: 상수도영업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(22202)

붙임 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 사유서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

주무관	박정민		기전팀장	박성철		시설관리과장	변재홍		북부수도사업소장	11/30 심말숙
협조자	주무관	김수진		주무관	한경란
시행	시설관리과-21462	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02-3146-3417	/전송	02-3146-3439	/	jmp7019@seoul.go.kr	/	부분공개(5)